문서번호	고도정수반-2134
결재일자	2014.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		고도정수반장	시설안전부장
라승보		이임섭	전결 06/10 윤석우
협 조

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사』

도달기지 가시설 철거 고재처리량 정산 실정보고

2014. 6.

시설안전부

(고도정수반)

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사』

도달기지 가시설 철거 고재처리 수량 정산

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설 공사』관련 도달기지 가시설(쉬트파일, 띠장등) 고재처리 수량 정산에 대한 보고임.

사업개요

○ 공사규모 : 송수터널      D=2,200㎜, L=1,426m

송수관 부설 D=1,500㎜, L=1,511m

○ 공사기간 : ’11. 9. 8.  ～  ’14. 6.30.(4차분  ’14. 3.21. ~ ’14. 6.30.)

○ 시 공 사 : 중흥건설㈜ 외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜건화

실정보고 내용

※관련문서 : 도달기지 가시설 철거 고재처리 수량 정산 실정보고(건올감 2014-184호,’14.6.5.)

○ 설계현황

- 본 공사 1단계(2010년)에서 시공한 도달기지 가시설에 대하여 철거비와 고재처리 비용이 금회 공사에 반영됨.

○ 보고사유

- 도달기지 가시설 철거 결과 설치된 파일 연장이 지반 여건에 따라 달라(2.73m~9.39m) 고재처리 수량이 설계와 상이, 실제 발생 수량으로 정산 필요.

- 동작대교 남단 기존관(D2200mm) 중간변실 및 공기변 설치시 발생한 고재처리량 반영.

- 공사비 증감                                            (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 감
직접공사비	-69,688	-42,827	26,861
간접비	-19,152	-11,063	8,089
도급 공사비(합계)	-88,840	-53,890	34,950

- 고재 수량 증감 현황

구 분	단위	당 초	변 경	증 감
사보강재	ton	8.277	3.272	-5.005
띠장	ton	14.083	13.050	-1.033
Tie-Rod Post Pile	ton	8.116	4.445	-3.671
Tie-Rod Wale	ton	3.252	2.575	-0.677
Sheet Pile	ton	130.049	99.678	-30.371
D2200mm 폐관	ton	6.307	5.027	-1.28
강재할증	ton	22.336	-	-22.336
합 계	ton	192.42	128.047	-64.373

- 현황사진

□ 책임감리원 검토의견

○ 실정보고 내용과 같이 실제 발생량으로 정산 변경함이 타당할 것으로 사료됨.

공사관리관 의견

○ 감리단 의견을 검토한 바 타당하여 실정보고 사항을 승인하고, 향후 계약금액 조정시 정산 조치코자 함.

붙임 : 도달기지 가시설 철거 고재처리 수량 정산 실정보고 1부. 끝.