문서번호	고도정수반-2136
결재일자	2014.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		고도정수반장	시설안전부장
라승보		이임섭	전결 06/10 윤석우
협 조

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사』

환경보전비 요율적용 금액 삭제 실정보고 검토

2014. 6.

시설안전부

(고도정수반)

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사』

환경보전비 요율적용 금액 삭제 실정보고 검토

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설 공사』환경보전비 적용 관련 보고임.

사업개요

○ 공사규모 : 송수터널      D=2,200㎜, L=1,426m

송수관 부설 D=1,500㎜, L=1,511m

○ 공사기간 : ’11. 9. 8.  ～  ’14. 6.30.(4차분  ’14. 3.21. ~ ’14. 6.30.)

○ 시 공 사 : 중흥건설㈜ 외 1개사

○ 감 리 사 : ㈜건화

실정보고 내용

※관련문서 : 환경보전비 요율적용 금액 삭제 실정보고(건올감 2014-185호,’14.6.5.)

○ 설계현황

- 직접공사비에 세륜기와 오탁방지망등 환경보전 목적의 비용 적용됨.

- 원가계산 간접비에 환경보전비 항목으로 직접공사비의 0.5% 별도 계상됨.

○ 보고사유

- 환경보전비 산출기준은『환경보전비를 표준품셈등 원가계산에 따라 산출하여 내역서에 각 항목별로 명시하고, 원가계산에 의하여 산출이 곤란 할 경우 요율을 적용』하여 계산토록 함.

- 따라서 중복반영된 환경보존비 중 요율로 반영된 환경보존비를 삭제.

- 전진수직구 되메우기시 비산방지용 트레미 제작설치비, 정화조(자재비), 침사조 설치비를 직접공사비에 추가 반영.

- 공사비 증감                                            (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 감
직접공사비	-	20,515	20,515
환경보전비	53,776	-	-53,776
제경비	12,224	9,485	-2,739
도급 공사비(합계)	66,000	30,000	-36,000

※ 적용된 단가는 협의단가 적용(협의율 90.857%)

□ 책임감리원 검토의견

○ 건설기술관리법 시행규칙 별표16 “환경관리비 산출기준” 및 계상방법에 의하여 요율 적용하여 계산된 환경보전비 삭제와

○ 추가 설치한 환경보전 목적의 침사조, 트레미, 정화조(자재비) 반영은 타당할 것으로 사료됨.

공사관리관 의견

○ 감리단 의견을 검토한 바 타당하여 실정보고 사항을 승인하고, 향후 계약금액 조정시 정산 조치코자 함.

붙임 : 환경보전비 요율적용 금액 삭제 실정보고 1부. 끝.