문서번호	시설과-3976
결재일자	2014.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장
남상국		06/10 함석주
협조

장충단공원내 어린이놀이터 조성사업 실시설계용역

준공기한 연기 검토 보고

2014. 6

중부공원녹지사업소

(시  설  과)

장충단공원내 어린이놀이터 조성사업 실시설계용역

준공기한 연기 검토 보고

장충단공원내 어린이놀이터 조성사업 실시설계용역 중 용역기간 변경사항이 발생하여 검토 보고드림.

□ 용 역 개 요

용 역 명 : 장충단공원내 어린이놀이터 조성사업 실시설계용역

용역기간 : 2014. 3. 17. ~ 2014. 6. 14

도 급 비 : 13,076,750원

도 급 자 : ㈜천마이앤씨 대표 제상호

용역내용 : 장충단공원내 어린이놀이터 조성 실시설계

□ 준공기한 연기

연기기간

- 당  초 : 2014. 3. 17 ~ 2014. 6. 14

- 변  경 : 2014. 3. 17 ~ 2014. 8. 30

연기사유 : 공원조성계획 변경에 따른 주민의견청취 및 유관기관    (부서) 협의, 도시공원위원회 심의 등 사전절차 이행 기간이   추가로 필요하여 연기

지체상금 부과여부 검토

- 연기사유 귀책소재는 중부공원녹지사업소, 지체상금은 미부과

□ 보고의견

상기와 같이 준공기한을 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.