함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2014년 상반기 배수지 항청소 일정 변경 시행

우리과에서 시행중인 『2014년 노량진배수지외 6개소 항청소 용역』과 관련하여 항청소 일정을 다음과 같이 변경 시행코자합니다.

가. 용 역 명 : 2014년 노량진배수지외 6개소 항청소 용역

나. 청소기간

- 당초 : 2014.04.04 ~ 2014.06.10

- 변경 : 2014.04.04 ~ 2014.06.30

다. 변경사유 : 배수과-3716호(’14.6.5) 암사1정수장 생산중단에 따른 항청소 중단 지시 등

※ 노량진배수지 항청소만 남아 있음(4지 완료)

붙임 : 배수지 항청소 일정(변경) 1부.  끝.

주무관	이승영		주무관	김태식		시설관리과장	06/10 조상덕
협조자	기전팀장	오준식
시행	시설관리과-13011	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-4599	/전송		/		/	대시민공개