함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(2013년 역촌동외 8개동 상수도공사)

1. 우리사업소에서 시행중인 『2013년 역촌동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(3회, 최종)을 시행하고 변경계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2013년 역촌동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 계약상대자 : 태동건설(주) 대표 정기환

다. 공사기간 : 2013.04.16 ~ 2014.06.30

라.  계약 금액(도급액)                                      (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증,감	비고
도급액	628,754,146	652,000,000	증)23,254,854

마. 설계변경 사유 : 신규공종 발생 및 계약물량 증,감

바.  예산과목

- 상수도사업비용,영업비용,급수공사비,신설공사비

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비(지원사업성시설비)

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비(기타교체비)

- 자본적지출,가동설비자산,구축물,시설비

붙 임 : 1. 설계변경 방침서 및 내역서 1부. 끝.

	서부수도사업소장
주무관	강병국		시설관리팀장	천성훈		시설관리과장	06/10 이자화
협조자
시행	시설관리과-15074	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울 서대문구 홍제2동 38-69	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3698	/전송	02-3146-3739	/	rido011@seoul.go.kr	/	대시민공개