문서번호	건축부-7044
결재일자	2014.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
신현성		장윤수	06/10 이병석
협조

장충체육관 리모델링공사

철근콘크리트공사 실정보고

2014. 6.

도시기반시설본부 (건축부)

장충체육관 리모델링공사

철근콘크리트공사 실정보고

장충체육관 리모델링공사 중 철근콘크리트공사 구조 및 물량변경에 대한

책임감리자 실정보고 처리 방안임.

1		관련근거

◌ JCR-기술-14-23(2014.06.09.)호 : 철근콘크리트 구조변경에 대한 실정보고

◌ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조(설계변경으로 인한 계약 금액의 조정)

2		콘크리트 변경 현황

구분	변 경 내 용	비고
1	1층 주경기장 철근콘크리트 구조변경(무근con'c → 철근콘크리트 구조변경) ※ 보성구조 현장확인 후 바닥 재설계
2	관람석 편의시설개선 (VIP석, 기자석 → 가족석, 커플석으로 구조변경)
3	지붕철골구조 변경등(pipe구조 및 바텐, 캣워크 추가)으로 인한 3층기둥 등 변경 - 3층기둥 C6 : 400*600 → 450*700 - 지붕층 보(RPB1) : 400*600 → 250*600
4	3층기둥 기시공분 지붕설계변경으로 인한 높이 조정으로 재시공
5	연결통로 (지하환기구 및 우・오수관) 간섭으로 인한 구조변경
6	32/F열 기존기초 및 전기실 구조 간섭으로 인한 벽체조정
7	4번계단실 PIT구간 암발파 민원으로 인한 PIT높이 조정
8	연결통로 지하2층 우・오수 간섭에 따른 구조변경으로 기초 보강

3		물량 증가 현황

◌ 관급자재 현황

구분	명칭	규격	단위	수량		증감	비고
				변경전	변경후	수량
철근콘크리트 공사 변경	철근	HD10,SD400	톤	7.198	9.315	2.117	증
		HD13,SD400		0.068	17.526	17.458	증
		HD16,SD400		28.426	68.443	40.017	증
		HD19,SD500		0.400	12.742	12.342	증
		HD22,SD500		38.277	45.461	7.184	증
		HD25,SD500		36.548	73.109	36.561	증
	콘크리트	25-24-15	m3	390	841	451	증
		25-18-12		301	-	-301	감

◌ 철근콘크리트 공사비

항 목	실정보고 공사비현황 (원)			비고
	당초	변경	증감
철근콘크리트공사 구조변경 건	99,000,000	216,150,000	117,150,000

4		처리 방안

◌ 책임감리원의 의견에 따라 철근콘크리트공사(관급자재 증감)실정보고를 승인하여 공사시행하고자 하며 관급자재 구매시행 및 계약의뢰하고자 함.

따로붙임 : 책임감리원 실정보고서 1부.  끝.