투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	잠실역(8호선)지하연결통로 및 환기구 이설 교통안전시설물(노면표시) 원인자부담공사 변경 승인

1.  롯건연결통로제2014-132호(2014.6.5)호와 관련입니다.

2.  귀 사에서 시행하고 있는『잠실역(8호선) 지하연결통로 및 환기구이설구간내 교통안전시설물(노면표시)설치공사』 원인자부담공사와 관련하여 다음과 같이 공사기간 변경을 승인하오니

3. 원인자는 『원인자 준수사항』 및 『노면표시 시방서』에 의거 공사사행에 철저를 기하여 주시기 바라며, 유관기관에서는 본 승인 통보내용을 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 잠실역(8호선)지하연결통로및환기구이설구간내

교통안전시설물(노면표시) 설치공사

나. 공사위치 : 송파구 잠실역사거리~송파구청사거리

다. 변경사항

공사명	구분	설계	감리	시공사	원인자	공사기간 변경
						당초	변경
잠실역(8호선) 지하연결통로및환기구이설구간내 교통안전시설물(노면표시)설치공사	노면표시	㈜건영 이앤씨	㈜영호 이앤씨	㈜다물근린	롯데건설 ㈜	2013. 3. 21 ~ 2013. 12. 31	2013. 3. 21 ~ 2014. 6. 30

라. 변경사유 : 공사기간 연장에 따른 노면표지 공사기한 연기. 끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
수신자	롯데건설(주)(잠실역8호선 연결통로 조성공사 현장대리인 장철주)귀하,서울송파경찰서장(교통과장),송파구청장(녹색교통과장)
★주무관	유현선		주무관	박일연		도로보수과장	06/10 손수희
협조자
시행	도로보수과-3412	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 동부도로사업소 도로보수과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2040-0356	/전송	2040-0307	/		/	대시민공개