다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 세무종합시스템 운영 및 유지보수 주간보고(12주)

2014년 세무종합시스템 운영 및 유지보수사업과 관련하여 12주차 주간업무 처리 현황을 아래와 같이 보고드립니다.

아   래 -

○ 추진기간 : 2014. 6. 2 ~ 2014. 6. 5.

○ 추진사항

- 추가 및 보완개발 사항

구분	금주실적 (14.6.2~6.5)		차주계획 (14.6.9~6.13)		누적 (14.3.13~6.5)
	진행	완료	진행	완료	전체	완료	진행	지연	잔여	완료율	진행율	지연율
추가개발	0	9	2	8	24	2	9	7	13	8.3	45.8	77.8
보완개발	1	8	2	5	34	7	8	5	19	20.6	44.1	62.5
합계	1	17	4	13	58	9	17	12	32	15.5	31.0	70.6

- 운영 및 유지보수 사항

구분	전주 (14.6.2~6.5)			금주 (14.6.9~6.13)			누적 (14.3.13~6.5)
	접수	진행	완료	접수	진행	완료	미완료	완료	전체
부과	76	13	63	72	13	71	13	134	147
징수	76	3	73	32	3	32	3	105	108
공통기타	43	6	35	21	6	23	6	58	64

- 지방소득세 부과·징수프로그램 개발사항

구분	분석		설계		개발		테스트		전체
	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적
양도소득	99	97	85	75	-	-	-	-	36.8	34.4
종합소득	99	95	-	-	-	-	-	-	19.6	19.0
특별징수	99	97	85	75	-	-	-	-	36.8	34.4
법인소득	98	95	-	-	-	-	-	-	19.6	19.0
전체	98.5	96	42.5	37.5	-	-	-	-	28.2	26.7

붙임 : 1. 주간업무 현황보고(12주차). 1부.

2. 추진현황표. 1부.  끝.

★주무관	김의중		세무정보화팀장	김천억		세무과장	06/10 김근수
협조자
시행	세무과-12837	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 9층	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3408	/전송	02-2133-1034	/	wj4382@seoul.go.kr	/	부분공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다