문서번호	방재시설부-4302
결재일자	2014.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		정일환	06/10 代서관석
협조
	주무관		강종희

새창고개 철거공사 실정보고 검토

2014. 6.

도시기반시설본부

방재시설부

『경의선숲길 공원조성공사』

새창고개 철거공사 실정보고 검토

「경의선숲길 공원조성공사」 새창고개구간 포장바닥 철거 및 지장물 철거작업에 대한 검토 보고임.

▶ 관련근거 : 경의경춘(감) 제2014 – 269(2014.6.3)호

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경의선숲길 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 용산문화체육센터 ~ 가좌역

○ 규    모 : 공원조성 84,268㎡, L=3.48km

○ 사업기간 : ’13. 9. 30 ~ ’16. 3. 31

○ 공 사 비 : 11,812백만원

Ⅱ

실정보고 내용

○ 실정보고 사유

- 『경의선숲길 공원조성공사』 새창고개 Sta.no.2km~337.2(L=237.2m)구간은

조사결과 바닥포장깨기는 포장층이 콘크리트 및 아스콘 등으로 겹겹이

이루어진 다층구조로 설계두께와 크게 상이하여 실측수량으로 반영,

- 기타 동 구간 깨기, 절단, 휀스철거 등 설계와 상이한 수량은 실측수량 반영,

- 지중 상수관로(폐관) 보호구조물 철거수량 반영 및,

- 누락된 폐기물상차 비용 반영이 필요한 실정임.

○ 변경수량 검토

공 종	단 위	단 위	당 초	변 경	증 · 감
콘크리트포장깨기	T=30cm미만	㎥	283.1	535.3	증) 252.2
아스팔트포장깨기	T=30cm미만	㎥	63.8	162.6	증) 98.8
무근콘크리트깨기		㎥	541.0	98.6	감) 442.4
철근콘크리트깨기		㎥		55.8	증) 55.8

공 종	단 위	단 위	당 초	변 경	증 · 감
아스팔트포장절단		m	32.6	64.1	증) 31.5
콘크리트포장절단		m	25.0	8.5	감) 16.5
보도블록철거	인력	㎥	99.0	132.0	증) 33.0
도로안전휀스철거	H=1.2m, L=1.5m	m	454.0	341.5	감) 112.5
고재	스테인레스	ton	4.30	3.24	감) 1.06
폐기물상차		㎥		1,158.3	증) 1,158.3

○ 단가산정

- 신규단가

· 철근콘크리트깨기(30cm미만) : 2014년 실적단가 적용

- 낙찰율 80.013% 적용

○ 개략 공사비

(단위 : 천원)

공 종	당 초	변 경	증 · 감	비 고
순공사비(철거공)	17,082	23,039	증) 5,957
2. 제경비(부가세포함)	9,637	12,073	증) 2,436
3. 개략공사비	26,719	35,112	증) 8,393

Ⅲ

감리단 검토의견

○ 상기와 같이 『경의선숲길 공원조성공사』 새창고개 철거공사 실정보고 건에 대하여 검토한 결과 예측할 수 없는 지중 철거 구조물에 대하여 현장 확인결과를 반영하고, 설계서의 누락과 현장간 상호 모순되는 점에 대해서는

설계변경함이 적정하다고 판단되며,

○ 실정보고 사항에 대하여 추가 변동(수량 증·감)되는 부분과 새창고개 잔여구간(미인수 구간 등)은 추후 정산 실정보고 예정임.

Ⅳ

검토결과

○ 『경의선숲길 공원조성공사』 새창고개 Sta.no.2km~337.2(L=237.2m)구간 바닥포장 및 지장 철거물이 당초 설계와 상이하며, 폐기물 상차 또한 누락되어 있어 새창고개 포장바닥 철거 및 지장물 철거 작업에 대한 감리단 의견이 타당하다고 판단되어 차후 설계변경에 반영토록 승인 통지코자 함.

붙  임 : 감리단 실정보고서 1부.  끝.