문서번호	정보기획담당관-8373
결재일자	2014.6.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		웹서비스관리팀장	정보기획담당관
박경여		배상미	06/11 김종근
협조
	콘텐츠기획팀장		한철우

2014년 서울시 홈페이지 서비스 개선 및 운영 사업

월  간  보  고  (5월)

2014. 6

정보기획단

(정보기획담당관)

2014년 서울시 홈페이지 서비스 개선 및 운영 사업

월  간  보  고  (5월)

서울시 홈페이지의 안정적 운영과 서비스 개선을 위해 추진하고 있는 『2014년 서울시 홈페이지 서비스 개선 및 운영 사업』의 5월중  주요 추진과업에 대하여 보고함.

Ⅰ		사업개요

○ 사업기간 : ‘14. 3. 1 ~ ’15. 2. 28

○ 계약금액 : 1,220백만원

○ 계약업체 : (주)윤커뮤니케이션

○ 주요 사업내용

- 서울시 홈페이지 콘텐츠 기획 및 웹마케팅 추진

- 서울시 홈페이지 서비스 개선 및 운영

- 분야별 홈페이지 및 공공서비스 통합예약시스템 운영

- 공통기반시스템 안정적 운영 및 기능개선

- 홈페이지 웹접근성 및 웹호환성 개선, 웹취약성 제거

Ⅱ		‘14년 5월 주요 과업내용

○ 주요 업무 추진내역

- 서비스 개선 및 운영

․ 마일리지서버 보안 취약점 개선 – Struts2 업그레이드 (5/9)

․ 현장시장실 개선 (5/13)

․ 모바일 테마 템플릿 변경 (5/16)

․ 서울사회공헌네트워크 리뉴얼 (5/16)

․ CMS2 에디터교체 (5/16)

․ 한국스마트카드 시스템 고도화를 위한 연계 서버 작업 (5/19)

․ 소셜라이브리 퍼가기 위젯 변경 (5/21)

․ NAS 장비교체 장애처리작업 (5/21)

․ name-search 웹취약점 개선 (5/23)

- 이벤트 진행 2건

․ 2014 여름방학 대학생 아르바이트 모집 (5/14)

․ 디지털스토리텔링(서울역사여행) 오픈 (5/15)

개발진행 중 과업

․ 디지털 스토리텔링 안전 (진도 70%, 6/13 완료예정)

․ 2014년 시민참여단 신청 및 추첨 (진도 95%, 6/10 오픈예정)

․ 한강몽땅 프로젝트 홍보사이트 (진도 20%, 6/20 완료예정)

․ 접근성 및 호환성 개선작업 (진도 20%, 7월 완료예정)

○ 시스템 운영관리

분 야	‘14년 5월 작업요청건수		작업요청 누계
사업품질관리	39		79
기 획	52		218
콘텐츠 제작	1		4
콘텐츠 재가공	18		297
디 자 인	36		260
퍼블리싱	46		198
개 발	115		421
합 계	307		1,477

※ 세부 작업내역〔별첨1〕

○ 홈페이지 콘텐츠 수정보완 및 작성: 18건

※ 콘텐츠 수정보완 작업내역 [별첨2]

○ 신규 사이트 구축 및 이벤트

2014 여름방학 대학생 아르바이트 모집
▪ 서비스 시작일 : ‘14.5.14 ▪ 2014년도 여름방학 대학생 아르바이트 모집 안내페이지 ▪ 홈페이지 서비스 URL : http://www.seoul.go.kr/2014alba/

현장시장실 개선 오픈
▪ 서비스 : ‘14.5.13 ▪ 시장실 내 현장시장실 메뉴 개편

한강/농업기술센터 모바일템플릿 변경
▪ 서비스 : ‘14.5.16 ▪ 한강사업본부 / 농업기술센터 모바일템플릿 변경

소셜 라이브리 퍼가기 위젯 변경
▪ 서비스 : ‘14.5.21 ▪ 개선 내용 · 모바일 버전 위젯 업그레이드 및 아이콘 추가 · 삭제 : 미투데이, 싸이월드 · 추가 : 카카오톡, 카카오스토리, 라인

서울 사회공헌 네트워크 리뉴얼
▪ 서비스 : ‘14.5.16 ▪ 서울 사회공헌네트워크 리뉴얼 오픈 ▪ 서비스 URL : http://partnership.seoul.go.kr

○ 5월 월간보고 회의 개최

- 일시 : ‘14. 6. 9(월) 16:00 ~ 17:00

- 장소 : 정보기획단 3층 회의실

- 참석 : 컨텐츠기획팀 및 웹서비스관리팀

사업관련 담당자 및 수행사

- 내용 : 5월 과업내역 보고 및 6월 진행과업 관련 이슈 보고 및 질의

Ⅲ		‘14. 6월 주요 과업계획

○ 신규 콘텐츠 제작

안전분야(1년 365일 안전한 서울 – 여름) 기획 및 제작

역사분야(서울역사여행 - 근현대사) 기획 및 제작

○ SPP 게시판 프로그램 및 SQL 최적화 (상시진행)

SPP 접속로그 상시 분석, 프로그램로직 및 쿼리 현행화

○ 시민참여단 신청 이벤트 오픈 (6/10)

○ 한강 몽땅 프로젝트 홍보 사이트 개설 (6/20)

○ 축제 및 홍보성 행사 전용 템플릿 제작 (6/20~)

○ 접근성 및 호환성 개선 작업

Ⅳ		기성금 준공

(단위:원)

기성준공	기성준공 금액	지급액 합계
2014. 3월	101,666,670	101,666,670
2014. 4월	101,666,670	203,333,340
2014. 5월	101,666,670	305,000,010

[별첨1]

세부 작업 내역(5월)

과업구분	과업분야	내 용
기획/관리	사업 품질관리	장애대응 관리 매뉴얼
		보안점검 내용검토
		인력변경
		사회공헌 네트워크 오픈
		정보통신보안(통합관제)/데이터센터 업무협의
	기획	시민참여단 추첨화면 구성
		한강몽땅프로젝트 초기기획
		한강/농업기술센터 모바일 템플릿 기획
		[콘텐츠기획] 역사분야(서울 역사여행 – 조선시대까지) 안전분야(1년 365일 안전한 서울 – 여름)
워드프레스 (플랫폼)	플랫폼 고도화	모바일 새소식 연동을 위한 XML작업
		라이브리 SEQ 코드 현행화
		라이브리 동기화 API 변경
		한강/농업기술센터 모바일 템플릿 개발
신규사이트 구축 및 이벤트	이벤트	2014 대학생 아르바이트모집 (5/14)
		시민참여단 신청 및 추첨 (95%)
		한강몽땅 프로젝트 홍보사이트 (15%)
기존프로그램 개선	마일리지	한국스마트카드 연계완료(5/19)
		Aphache Struts2 업그레이드 적용 (5/9)
	대표 홈페이지	메인화면 날씨 위젯 업데이트 모듈 수정
	기타	NAS장비 교체에 의한 장애처리작업
	SPP/ CMS2	시스템 모니터링 및 SQL / 프로그램 최적화
		태그프리 에디터 업그레이드 적용(5/9)
	예약	레드마인(형상관리) 과업처리 진행
		오류추적을 위한 로그생성기능 추가

[별첨2]

콘텐츠 수정작업 내역(18건)

연번	콘텐츠 제목
1	역사와 문화가 숨쉬는 성북동, 걷기 좋은 길로 변신
2	2014년 상반기 어린이자연체험교실
3	『책, 눈물을 닦다』도서전시
4	5월 5일 어린이날에는 ‘서울상상나라’로
5	서울시, 이랜드프로축구단과 프로축구 연고협약 체결
6	수돗물 마시기 우리가 앞장선다 '아리수 누리단' 출범
7	서울디자인재단, 『국내 최고권위 서울모델리스트콘테스트』개최
8	제32회 서울특별시 건축상(대학생 아이디어) 공모(`14.5.8~29)
9	서울시, 112명 어린이·소년·청년 시민상 수상자 선정
10	농사일손돕기 참여 희망자 모집 안내
11	서울시, 국내 중소기업 해외 수도사업 진출 지원
12	마포 석유비축기지 국제현상설계 공모(‘14. 5.13~8.12)
13	서울도서관, 5월부터 인문독서 아카데미 운영
14	5월 여성행복객석 무료초대 이벤트
15	‘동대문 패션브랜드페어’·‘동대문 패션 소싱페어’ 동시개최
16	서울 52개 숨은 문화재 '스마트폰 스탬프투어' 어때요?
17	서울시 상수도, 트리니다드토바고에 벤치마킹 된다.
18	서울시, 제42회 어버이날 효행자 등 42명 표창