문서번호	방재시설부-4364
결재일자	2014.6.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		서관석	06/11 代서관석
협조

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

면목4동 기존하수암거 개구부 폐합 검토 보고

2014. 6

도시기반시설본부

(방재시설부)

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

면목4동 기존하수암거 개구부 폐합 검토 보고

면목4동 고지배수로 수밀성 유지를 위해 개구부(하수관로, 빗물받이 연결구, 맨홀, 작업구)폐합에 따른 서울시시설관리공단으로부터 현장실정 보고사항이 있어 이에 대한 검토 보고임.

사업개요

❍ 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

❍ 규    모

- 공릉2빗물펌프장 : 토출용량 Q=520㎥/분, 인입관거 412m

- 면목4동 배수관로 : 강관추진 52m, 배수관로 설치  380m

❍ 사업기간 : 2013. 1. 8 ∼ 2015. 6. 30

❍ 감리사/시공사 : 서울시시설관리공단/(주)승영기술공사외 1개사

❍ 도 급 비 : 5,365백만원

실정보고 내용

❍ 현황 및 문제점

- 면목4동 기존하수박스를 고지배수관로로 활용함에 따라 기존에 설치한 하수관, 빗물받이 연결구, 맨홀, 작업구 등 수밀성유지를 위한 개구부에 대하여 폐쇄조치가 필요한 실정임

․ 규모 : 고지배수관로 270m(□3.5*2.5m-96m, □2.0*2.0m-174m)

․ 관련근거 : 공사감독2처-4933(2014.4.24.)

- 개구부(유입하수관로 및 맨홀)현황

․ 유입하수관로(Ø100㎜~Ø1,000㎜) : 35개소

․ 원형맨홀(Ø600㎜) 2개소, 및 작업구(□2.5*1.5m) 1개소

흄관(500mm, sta 8.0m)	흄관(400mm, sta 184.0m)

※ 유입하수관로 구경 및 위치는 붙임(유입구 현황)참조

감리검토내용

❍ 기존박스를 압력 관로인 고지배수관로로 활용함에 따라 개구부(하수관,   빗물받이 연결구, 맨홀, 작업구 등)에 철근조립 후 고강도 몰탈을 타설하여 하수암거와 일체화시켜 수밀성유지코자 함

- 소요 공사비 : 18,260천원

보고자 의견

❍ 상기내용을 검토한 결과 서울시시설공단 위탁감독이 제출한 현장실정 보고사항이 적합한 것으로 판단되어 승인조치하고자 함.

붙임 : 1. 현장실정보고 검토서 1부.

2. 개구부 유입관로 현황 1부.

3. 개구부 폐합시공 방법 1부.

4. 소요공사비(내역) 1부. 끝.