문서번호	정수시설과-1097
결재일자	2014.6.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이성환	윤종민	06/11 김동기
협 조	정수과장		서한호
	행정관리팀장		고경환
	주무관		이금재
	주무관		김유선
	주무관		김진수
	주무관		이근보
	주무관		곽희영
	주무관		최양교
	주무관		김종수

『시설현대화 및 고도정수처리 시설공사 관련』

T/F팀 운영 분야별 현장점검 활성화 계획

2014. 6

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

『시설현대화 및 고도정수처리 시설공사 관련』

T/F팀 운영 분야별 현장점검 활성화 계획

시설현대화 및 고도정수처리 시설공사에 따라 대체급수 대책 및 공사 협의 등을 위해 운영중인 T/F팀 활동 중 분야별 현장 시공실태 합동점검을 활성화 함으로써 공사품질 향상 및 향후 정수장 운영 효율화를 도모하고자 함.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

❍ 사업내용

- 표준정수처리시설 현대화 : 70만㎥/일

- 고도정수처리시설 : 60만㎥/일

❍ 사업기간 : 2009.11 ~ 2016.12

❍ 시 공 사 : 삼성물산, 코오롱건설, 삼환기업

❍ 설 계 사 : 신우ENG, 범한ENG, 서영ENG

❍ C M     : 도화종합기술공사, 한국종합ENG

❍ 5월말 현재 공정율 : 48.3%

- 토목분야 : 착수정 개량 완료, #2계열 여과지 및 중계펌프장 구조물 완료

활성탄흡착지 및 오존접촉지 구조물 시공중

- 건축분야 : 염소투입동 신설 완료, #2계열 여과지 및 중계펌프장 시공중

- 기전분야 : #2계열 여과지 기계설비 완료, 중계펌프장 기전설비 시공중

옥외전력 간선설비 및 자동제어 설치공사 시공중

- 미시공분야 : #3계열 여과지, 침전지 시설현대화 및 전체 조경 등

□ T/F팀 분야별 운영 개요

❍ 분야별 구성 및 담당자 현황

구 분	총 괄	운영,수질	토목	건축	기계	전기	안전관리
본 부	송병욱	송병욱	송병욱	심찬석	유통희	박태식	문정주
정수센터	이성환	이금재 김유선	김종수	이성환	최양교	곽희영	고경환 김대원
CM	안충남	이윤선	김문갑	김준기	이윤선	강석봉	김문갑
삼성물산	윤여경	서용석	박용학	김기영	주명진	이상보	이진형

❍ 회의 운영

- 정례회의(전체) : 매월 마지막주 수요일

⇒ 회의 안건은 전체 확인이 필요한 안건 및 공정 일정조정 등

당면과제와 분야별 임시회의시 미합의사항 도출하여 종결

- 임시회의(분야별) :  분야별 수시 개최

⇒ 회의 안건은 분야별 확인이 필요한 안건 제시 및 협의

- 회의 주관 : 본부 총괄 담당자가 회의 준비

- 회의 장소 : 현장사무실 3층 CM회의실

□ T/F팀 운영 현장점검 활성화 방안

❍ 분야별 현장 점검 필요성

- 분야별 현장 합동점검으로 시공 부적합사항 보완조치에 의한 시공품질 개선

- 새로 도입되는 기술, 설비 등의 현장 적용시 아리수 생산운영 안정성 및            유지관리 효율성 여부 등 확인 조정

- 분야별 사전 현장점검으로 공사기간 중 안전, 보안 관리 상호 협조

❍ 점검 방향

- 점검 시기(매월 2회) : 매월 홀수주(격주) 목요일 현장점검의 날 지정

- 점검 방법 : 분야별 담당자 합동 점검(센터, CM, 시공사)으로 진행

- 점검 내용 : 현재 진행 공사 중인 분야별 현장 점검

□ 분야별 현장 점검결과 조치계획

❍ 분야별 점검결과 경미한 사항은 현장조치 및 시정 조치하고, 시일이         소요 되거나 중요 사항은 T/F팀 총괄 담당자에게 통보하여 관리        대장 등재 수합 정리토록 조치

❍ 본부 협의 및 조정 필요한 사항은 T/F팀 전체 회의 또는 분야별로        본부 담당자와 업무 협의 조정하여 조치

❍ 중요 사항은 관리대장 등재하여 T/F팀 전체 회의자료로 작성 활용하고

그 동안 분야별 추진사항 점검 및 향후 계획 논의

□ 그 동안 T/F 개선요구 및 조치현황(2014년 5월 현재)

❍ 2013년 운영회수 : 5회

- 1회(2. 6), 2회(2. 20), 3회(3. 14), 4회(10. 1), 5회(12. 5)

- 2013년 개선요구 및 조치결과 내용(진행 : 61.6%, 완료 : 38.4%)

구 분	계	조치불가 (재 협의건)	조치예정	조치완료
공통 및 토목	39	5	19	15
건축	10	-	6	4
기계	34	4	15	15
전기	16	3	9	4
계	99	12	49	38
추진율	100%	12.1%	49.5%	38.4%

※ 턴키공사로 경미한 사항외 설계변경에 반영되지 않으면 시정불가

❍ 2014년 운영회수 : 3회

- 1회(3. 5), 2회(4. 30), 3회(5. 28)

- 2014년 개선요구 및 조치결과 내용

∙ 총 괄 표  :  총 133건

소계	개선요구 및 조치 현황
	조치 완료	협의 진행 중	신규 건의	비고
133건(100%)	42건(31.6%)	91건(68.4%)	0(00.0%)

∙ 분야별 추진현황

구 분	계	협의 진행 중 (91건)		조치 완료 (42건)		신규 건의
		조치불가 재 협의	개선 진행 중	개선 완료	조치불가 종결
공통 및 토목	46	1	32	11	2	-
건축	17	2	8	6	1	-
기계	51	1	31	14	5	-
전기	19	-	16	2	1	-
계	133	4	87	33	9	-

별첨 : 1. T/F 개선 요구사항 조치 결과 관리대장(5.28). 1부.

2. 시설현대화 현장점검 합동점검표. 1부..