투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	녹색자금사업 실시설계용역 기간연장 시행

1. 시설과-2869(2014.6.11)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인 『시립영보자애원등 2개소 녹색자금사업 실시설계용역』에 대하여 아래와 같이 기간연장하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 시립영보자애원등 2개소 녹색자금사업 실시설계용역

나. 용역기간 : 2014. 4. 21 ~ 2014. 6. 12

다. 계약금액 : 금13,452,000원(금일천삼백사십오만이천원정)

라. 도 급 자 : (주)동해종합기술공사 대표 정점래

마. 당초준공일 : 2014. 6. 12

바. 연기준공일 : 2014. 7. 11

사. 지체상금부과여부 : 미부과

아. 연기사유귀책소재 : 서울특별시서부공원녹지사업소

자. 연기사유

- 수혜기관 요구사항 반영, 전문가 자문 및 설계도서 작성 등으로                    용역기간이 절대 부족하여 기간연장이 불가피함.

붙임 : 1. 준공기한 연기조치 의뢰서 1부.

2. 기간연장 검토보고 1부.  끝.

★주무관	김지훈		토목시설팀장	윤학수		시설과장	한성현		서부공원녹지사업소장	06/11 신시섭
협조자
시행	시설과-2874	(	2014.6.11.	)	접수		(		)
우	121-250	서울 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화	02-300-5534	/전송	02-300-5569	/	2009041690@seoul.go.kr	/	대시민공개