투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	2014년 서울숲 및 응봉공원 질서유지 관리용역 설계변경 시행

1. 서울숲공원관리사무소-5143(2014. 6.10)호와 관련입니다.

2. 서울숲공원관리사무소에서 시행중인  「2014년 서울숲 및 응봉공원 질서유지 관리용역」에 대하여

아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2014년 서울숲 및 응봉공원 질서유지 관리용역

나. 용역기간 : 2014. 2. 21 ~ 2015. 2. 20

다. 계 약 자 : ㈜ 다보산업관리 대표 정채열

라. 도 급 액 : 금524,483,630원(금오억이천사백사십팔만삼천육백삼십원)

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증 . 감	비 고
총 용역비		503,189,450	524,483,630	증 21,294,180
도급비	공급가액	457,444,955	476,803,300	증 19,358,345
	부가가치세	45,744,495	47,680,330	증 1,935,835
	계	503,189,450	524,483,630	증 21,294,180

마. 변경사유 : 서울숲 토, 일, 공휴일 공원이용객 급증으로 주간 수시 경비용역 보강 추가투입

- 당 초 : 연간인원 총5,023명(주간1,201명, 야간1,931명, 심야1,891명)

- 변 경 : 연간인원 총5,283명(주간1,461명, 야간1,931명, 심야1,891명)

· 서울숲공원 변경전 주간인원 3명 → 주간인원 8명

(6월14일부터 ～ 11월16일까지 토, 일, 공휴일 52일간 5명 보강투입)

라. 예산과목 : 동부공원녹지사업소공원운영과, 공원녹지관리수준향상및도시 녹화지원,

공원관리및도시녹화지원,  동부공원녹지사업소산하공원 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

붙 임 : 1. 설계변경사유 보고서(방침서) 1부.

2. 변경 설계내역서 1부. 끝.

	서울숲공원관리사무소장
주무관	김종경		운영팀장	최원아		서울숲공원관리사무소장	06/11 권오국
협조자	주무관	지정희		주무관	김덕수
시행	서울숲공원관리사무소-5158	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울시 성동구 뚝섬로 273 서울숲공원관리사무소(운영팀)	/
전화	(02)460-2902	/전송	(02)460-2930	/	kjk0818@seoul.go.kr	/	부분공개