함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 책임사업관리자
(경유)
제 목	활성탄흡착지 유입수로 방수/방식 변경 승인 통지

1. 구의CM 제2014-282호(2014.6.9)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사와 관련 금회 보고한 사항은 “활성탄흡착지 유입수로 방수/방식 변경검토 보고”한 사항으로 검토결과, 관계전문가 자문회의 개최(2014.5.8.)시 제시된 자문위원 검토의견을 반영한 사항으로 승인 통지함을 알려드리오니,

3. 책임사업관리자께서는 공사시행에 따른 제반 공정관리, 품질 및 안전관리에 철저를 기하여 시공하여 주시기 바라며,

4. 활성탄흡착지 유입수로 방수/방식 변경시공에 따른 증액되는 공사비는 계약특수조건(1) 제26조(설계변경 등)에 의거 계약금액 조정대상에 해당되지 않는 사항으로 총공사비 범위내에서 설계변경 반영토록 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 활성탄흡착지 유입수로 방수/방식 변경 실정보고 검토방침 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	이재학		고도정수반장	이임섭		시설안전부장	06/11 윤석우
협조자
시행	고도정수반-2157	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 서소문로 51	/
전화	1453	/전송	3146-1429	/	hak2509@seoul.go.kr	/	대시민공개