투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약 체결 - 금호나들목 외 5개소 조명등 교체공사

1. 기전설비1과-2194(2014.6.11.)호와 관련입니다.

2. 기전설비1과에서 시행하는『금호나들목 외 5개소 조명등 교체공사』건에 대하여 다음과 같이 변경계약을 체결하고자 합니다.

가. 계약현황

계 약 명	계약업체(대표자)	계약금액(원)	공사기간
금호나들목 외 5개소 조명등 교체공사	신라전기건설공사 (######)	45########	2014.3.17. ~ 2014.6.14.

나. 변경내역 : 계약금액 변경(##########), 준공기한 변동없음

구분	계 약 명	계약업체	계약금액(원)	공사기간
변경 전	금호나들목 외 5개소 조명등 교체공사	신라전기건설공사 (######)	##########	2014.3.17. ~ 2014.6.14.
변경 후	금호나들목 외 5개소 조명등 교체공사	신라전기건설공사 (######)	########## ###########	2014.3.17. ~ 2014.6.14.

다. 변경사유 ##기능이 중복된 중앙제어기 제외 및 누락된 전선품 등 추가

붙임 :  1. 계약변경 의뢰 및 설계변경도서 제출(시설관리공단) 공문 각 1부.

2. 변경설계서 1부.

3. 변경내역서 1부.  끝.

주무관	이재승		총무과장	최대봉		총무부장	전결 06/12 서영관
협조자
시행	총무과-8729	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0722	/전송	02-3780-0740	/	existwin@seoul.go.kr	/	부분공개