문서번호	교량보수과-4062
결재일자	2014.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장
김시련		06/12 이인섭
협조
	주무관		기효상

시설물 보수 작업지시 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 06

시설물 보수 작업지시 검토 보고

북부고가교 정밀점검 용역에서 발견된 교량 받침장치 부식에 대하여 장기적으로 공공의 안전을 확보하고 시설물의 효용을 증진시키고자 우리 사업소 일상유지보수업체로 하여금 작업지시 하고자 합니다.

□ 작업지시 근거

○ 2014년 북부고가교 외 3개소 정밀점검 용역 보고서에서 조사된 사항

- 북부고가교 받침장치 부분이 부식되어 많은 녹이 발생하고 있는 156개소에 대한 기능 회복과 향후 유지관리를 위하여 재 도장이 요구됨

□ 작업지시 내역

시설물명	작업공종	위 치	수량	작업방법 (공법)	작업조건		비고
					주간	야간
북부고가	받침장치 재도색	3공구	63개소	재도색	○
	받침장치 재도색	4공구	78개소	재도색	○
	받침장치 재도색	정릉램프	13개소	재도색	○
	받침장치 재도색	길음램프	2개소	재도색	○

※ 상기 작업지시 내용 중 작업공종, 보수물량은 현장여건에 따라 다소 상이할 수 있어 추후 시공량에 따라 정산예정

□ 공사기간 : 2014. 06. 16 ~ 2014. 07. 04

□ 소요예산(별첨 내역서)

○ 북부고가교 교량 받침장치 재 도장 156개소

- 개략 8,400천원

□ 조치사항

- 시설물 보수 공사시 안전사고가 발생하지 않도록 안전시설을 충분히 설치하고, 교통 통제가 필요할 경우 관련기관과 사전 협의 및 인․허가를 득하여 시행

- 보수공사 시행 중에는 시민불편사항을 감안하여 시설물 보수 알림 표시를 설치

- 공사완료 보고서 제출 시 동일 위치에서 공사 전･중･후 사진을 첨부 할 것

붙임 :  수량산출서 및 개략사업비 소요 내역서 1부.  끝.