문서번호	건축부-6684
결재일자	2019.4.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
고병준		이형재	전결 04/22 임인구
협조

서울의료원 권역응급의료센터 증축공사

관급자재(철근, 레미콘)구매 발주계획

2019. 4.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『서울의료원 권역응급의료센터 증축공사』

관급자재(철근, 레미콘)구매 발주계획

우리본부에서 추진중인『서울의료원 권역응급의료센터 증축공사』와 관련하여 관급자재(철근, 레미콘) 구매 발주 계획을 보고함.

1		공사현황

□ 공사개요

○ 공 사 명: 서울의료원 권역응급의료센터 증축공사

○ 위    치: 중랑구 신내로 156(신내동, 서울의료원)

○ 규    모: 지상3층, 연면적 3,669.62㎡

○ 용    도: 의료시설(종합병원)

○ 도급금액: 5,281,886,000원

○ 공사기간: 2019.2.11.~2020.8.10.

□ 추진경위

○ ‘18. 12. 27.: 공사 계약 체결

○ ‘19. 02. 11.: 공사 착수

○ ‘19. 02. 28.: 건설폐기물 처리용역 계약 체결

○ ‘19. 4. 현재.: 조경시설물 철거 및 지장물 이설공사

2		철근, 레미콘 구매계획

공종	품 명	규 격	단 위	수량	금액(원)	기간
건축	레미콘(구체)	25-24-15	M3	4,097	286,134,480	19.11.10.까지
	레미콘(버림)	25-18-8	M3	123	7,437,810
건축	철근콘크리트용봉강	철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD-10	TON	83.109	60,474,264	‘19.11.10.까지
	철근콘크리트용봉강	철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD-13	TON	59.136	42,412,339
	철근콘크리트용봉강	철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD-16	TON	42.979	30,599,759
	철근콘크리트용봉강	철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD400), HD-19	TON	99.988	71,188,456
	철근콘크리트용봉강	철근콘크리트용봉강, 이형봉강(SD500), SH-22	TON	172.313	128,083,699
계					626,330,807

○ 소요예산: 626,330,807원(조달수수료 별도)

○ 구매계획

- 구매방법: 조달구매

- 투입시기: 공사일정에 따라 구매 및 납품요구

○ 예산과목

- 시민건강국 보건의료정책과, 공공보건·의료분야 대시민 서비스 수준 향상, 공공의료기관 관리 및 운영 개선, 서울의료원 권역응급의료센터 건립, 시설비 및 부대비, 시설비

3		검토의견

○ 지장물 이설공사가 완료되는 대로 가설 방음벽 설치를 위해 책임건설사업관리자의 검토 의견과 같이 레미콘, 철근콘크리트용 봉강을 우선 발주하고자 함.

붙 임: 1. 관급자재수급계획서 검토 보고 1부.

2. 관급자재 상세정보 1부.  끝.