투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(주거사업과장)
(경유)
제목	사업기간 변경 인가 고시 신청(전농동~배봉로간 연결고가도로)

1. 서울특별시고시 제2015-263호(2015.09.03.)로 도시계획시설(도로)사업 실시계획 인가 고시되어 우리본부에서 추진중인 『전농동 588 ~배봉로간 연결고가도로 건설공사』에 대한 사업기간이 2018.12.31.까지로 고시되어 있어 아래와 같이 사업기간 변경 인가고시를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 전농동 588 ~ 배봉로간 연결고가도로 건설공사

나. 위    치 : 동대문구 전농동 588-1 ~675

다. 사업개요 : 연결고가도로 개설 : 폭 20m  연장 476m

라. 사업기간 변경요청

- 당초 : 실시계획인가일로부터 ~ 2018.12.31.

- 변경 : 실시계획인가일로부터 ~ 2023.12.31

마. 변경요청 사유

- 한국철도공사 부지 편입에 대한 보상 및 보완 설계에 따른 사업기간 연장.

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	차성민		환경시설과장	장수철		방재시설부장	04/22 이임섭
협조자
시행	방재시설부-5644	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화	02-3708-8785	/전송		/	csm0528@seoul.go.kr	/	대시민공개