문서번호	기전과-2243
결재일자	2019.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	남부도로사업소장
김현태		代김용문	04/22 김영삼
협조
	주무관		김해중

국사봉터널 라디오 재방송설비

누설동축케이블 교체 공사 계획

2019. 4.

남부도로사업소

(기전과)

국사봉터널 라디오 재방송설비

누설동축케이블 교체 공사 계획

국사봉터널에 설치된 라디오 재방송설비의 노후된 누설동축케이블이 라디오 수신 성능을 저하시키므로, 노후 누설동축케이블을 교체하여 라디오 수신율을 개선하고자 함.

1		관 련 근 거

○ 도로터널 재난방송 수신성능 점검결과 보고 : 기전과-6114(2018. 12. 13.)

○ 2019년 터널 및 지하차도 재방송설비 유지관리용역(연간단가) 3월 점검결과보고서 : 기전과-1679(2019. 3. 25.)

2		시설물 현황

○ 일반 현황

구 분	폭	연 장	높 이
규 모	10m	320m	6.1m

○ 재방송설비 현황

구 분	FM 채널 수	제조사	제조년
국사봉터널	19채널	아함전자	2004. 11.

3		사 업 개 요

○ 사 업 명 : 국사봉터널 라디오 재방송설비 누설동축케이블 교체 공사

○ 총사업비 : 66,000천원

구 분	금 액(원)	비 고
공사비	60,000,000
부가세	6,000,000
합 계	66,000,000

○ 사업기간 : 2019. 5. ~ 2019. 7.

○ 누설동축케이블 교체 사유

- 2018년 11월 한국전파진흥협회에서 실시한 재방송설비 수신 측정 결과 : 부적합

- 2019년 재방송설비 유지관리 연간단가업체 점검 결과 : 누설동축케이블 노후로 손실 많음

○ 주요 사업 내용

- 누설동축케이블 620m 교체

○ 국사봉터널 위치도 및 전경사진

위치도 및 전경사진

4		사업 추진 계획

○ 발주방법 : 전자공개 수의계약

○ 참가자격 : 정보통신공사업법 제14조에 의한 “정보통신공사업”에 등록된 업체로서, 주된 사무소가 서울시에 소재한 업체

○ 공사기간 : 착공일로부터 28일

○ 예산과목

- 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로기전시설물 일상유지보수, 시설비

5		향후 추진 계획

○ 2019.  4.	예산재배정 요청(도로시설과)

○ 2019.  5.	공사 계약 의뢰(관리단속과)

○ 2019.  7.	공사 준공

○ 2019.  7.	재방송 수신 측정 의뢰(한국전파진흥협회)

○ 2019.  8.	재방송 수신 측정 결과 제출(도로시설과)

붙임  1. 설계내역서 1부.

2. 국사봉터널 재난방송 수신환경 측정 결과보고서 1부.

3. 2019년 터널 및 지하차도 재방송설비 유지관리 용역(연간단가) 점검 보고서 1부.  끝.