문서번호	주거환경과-5154
결재일자	2014.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주거환경계획팀장	주거환경과장
고병호		정거택	06/12 최성태
협 조
	주거환경행정팀장			류재인
	주무관			이동호

『학생공모전 대상지 주민의견수렴 기초조사 용역』

준공기한 연기 검토보고

- 역촌동, 삼선동1가 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2013. 6

주택정책실

(주거환경과)

『학생공모전 대상지 주민의견수렴 기초조사 용역』

준공기한 연기 검토보고

- 역촌동, 삼선동1가 -

현재 추진중인 역촌동,삼선동1가 학생공모전 대상지 주민의견수렴 기초조사 용역에 대한 준공기한 연장사유가 있어 보고 드림

용역개요

구역	역촌동	삼선동1가
면적	56,000㎡	28,000㎡
과업수행자	홍익대학교 산학협력단	고려대학교 산학협력단
참여연구진	장일문 연구원 외 3 (정재용 지도교수)	이희근 연구원 외3 (김세용 지도교수)
용역금액	19,322천원	19,322천원
용역기간	‘13. 12. 23 ~ ‘14. 6. 20	‘13. 12. 18 ~ ’14. 6.15
과업대상지

추진현황

❍ ‘13. 12. 18 : 용역계약 및 착수(역촌동 12.23)

❍ ‘14. 01. 09 : 용역 착수보고회

❍ ‘14. 04. 24 : 용역 중간보고회

❍ ‘14. 05. 14~22 : 기초조사용역 관련 실무회의 개최(역촌동,삼선동1가)

- 주민동의율 확보 등을 위해 용역 준공기한 연장(당초 6월⇒8월)

준공기한 연기검토

❍ 준공기한 연기

- 역촌동 : ‘14. 6. 20. → ’14. 8. 31(72일 연기)

- 삼선동 : ‘14. 6. 15 → ’14. 8. 31(77일 연기)

❍ 연기사유 귀책소재 : 우리시(지체상금 미부과)

❍ 준공기한 연기사유

- 세월호참사, 6.4지방선거 등으로 주민설문조사가 어려워 주민동의율(토지등 소유자) 확보 미비

⇒ 향후 정비계획 수립을 위한 주민동의율 50% 이상 확보 필요

⇒ 기초조사용역과 정비계획 수립용역의 연계 유도

- 정비계획 용역 착수시까지 지속적인 주민 소모임 등을 통한 주거환경관리사업의 이해 증진 및 공감대 형성 도모

조치계획

❍ 우리시 귀책사유로 인한 과업기간 연장으로써, 첨부된 과업수행 공정표에 의거 용역 준공기한을 연기하고자 함.

붙임   1) 준공기한 연기의뢰서 1부.

2) 관련공문 및 합의각서 각 1부.  끝.