문서번호	고도정수반-2242
결재일자	2014.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		고도정수반장	시설안전부장
라승보		이임섭	전결 06/12 윤석우
협 조

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사』

도달기지 콘크리트깨기 실정보고 검토 보고

2014. 6.

시설안전부

(고도정수반)

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사』

도달기지 콘크리트 깨기 실정보고 검토

『올림픽대로 상수도관 이중화 부설 공사』관련 도달기지 원상복구시 발생한 콘크리트 깨기 물량 증가에 대한 보고임.

사업개요

○ 공사규모 : 송수터널      D=2,200㎜, L=1,426m

송수관 부설 D=1,500㎜, L=1,511m

○ 공사기간 : ’11. 9. 8.  ～  ’14. 6.30.(4차분  ’14. 3.21. ~ ’14. 6.30.)

○ 시 공 사 : 중흥건설㈜ 외 1개사(감리사 : ㈜건화)

실정보고 내용

※관련문서 : 도달기지 원상복구에 따른 콘크리트 깨기 실정보고(건올감 2014-196호,’14.6.11.)

○ 보고사유

- 도달기지 되메우기 후 호안 복구시 호안 사면 위로 돌출된 도달기지 수직구 콘크리트 벽체 철거가 필요함.

- 호안복구 구간에 인접한 손상된 기존 호안 철거에 따른 콘크리트 깨기 물량 발생.

- 당초 설계에는 위의 콘크리트 깨기 물량이 반영되지 않음.

- 현황도

도달 수직구 벽체 콘크리트 깨기

호안 사면

하천법면

수직구 콘크리트 깨기

○ 수량 및 공사비 증감 현황

- 주요 수량 증가 현황

구 분	단위	당 초	변 경	증 감
콘크리트 깨기	㎥	-	57	57
폐기물 상차	㎥	-	57	57
폐기물 운반 및 처리	ton	-	131	131

- 공사비 증감                                              (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증 감
직접공사비	-	1,774	1,774
간 접 비	-	926	926
도급 공사비(합계)	-	2,700	2,700
폐기물 처리비	-	7,997	7,997
총 공사비	-	10,697	10,697

□ 책임감리원 검토의견

○ 위 실정보고 내용과 같이 반영함이 타당할 것으로 사료됨.

공사관리관 의견

○ 감리단 의견을 검토한 바 타당하여 실정보고 사항을 승인하고, 향후 계약금액 조정시 정산 조치코자 함.

붙임 : 도달기지 원상복구에 따른 콘크리트 깨기 실정보고 1부. 끝.