문서번호	정수과-1580
결재일자	2014.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
유동구		이태일	06/12 오세영
협 조
	주무관			정희중

사업장폐기물(정수슬러지) 운반·처리용역 준공처리

2014. 6.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

사업장폐기물(정수슬러지) 운반․처리용역 준공처리

구의아리수정수센터 장기계속 연간단가계약으로 시행 중인 사업장폐기물(정수슬러지) 운반․처리용역 계약기간이 만료되어 아래와 같이 준공처리 하고자 합니다.

계약현황

계약업체 : (주)석경회 - 처리, 임송농산(주) - 운반

계약물량 : 20,000톤/2년

용역기간 : 2012. 6. 19 ~ 2014. 5. 31

계약현황	계약물량(톤)	완 수 기 한	계약금액(원)
1차년도	3,600	2012.06.19 ～ 2012.12.31	154,764,000
2차년도	9,600	2013.01.01 ～ 2013.12.31	412,704,000
3차년도	6,800	2014.01.01 ～ 2014.05.31	292,332,000
총차계약	20,000	2012.06.19. ～ 2014.05.31	859,800,000

계약금액 : 859,800,000원(계약단가 : 42,990원/톤)

구 분	당 초		변 경		비 고
	계약물량	계약금액	계약물량	계약금액
1차변경	20,000	859,800,000	14,899	640,508,010	2013년도 마감에 따른 변경계약(2013.12.18.)
2차변경	14,899	640,508,010	9,669	415,670,310	2014년도 마감에 따른 변경계약(2014.6.5.)

변경계약 내역

변경계약 사유

- 당초 제2정수장을 2013년 12월 준공하여 정수생산량을 25만톤에서 50만톤으로      증설할 예정이었으나, 준공일정이 2014년 말로 연기되어 사업기간 내 정수생산량이          25만톤으로 정수생산량 감소에 따라 슬러지 생산량이 감소함.

- 예산 편성한 2011년도의 서울지역 강수량이 2,039mm이었으나 실제 2012년 1,646mm, 2013년에는 1,403mm가 내려 슬러지 케익 발생량이 대폭 감소함.

보고자 의견

- 사업장폐기물(정수슬러지) 운반․처리용역 계약기간(2012.6.19.∼2014.5.30.)이 만료되어,

- 계약물량 및 금액을 아래와 같이 변경하여 준공처리하고자 함.

계약 물량(톤)		계약 금액(원)		비고
당 초	변 경	당 초	변 경
20,000톤	9,669톤 (-10,331톤)	859,800,000원	415,670,310원 (-444,129,690원)

끝.