문서번호	도시철도설비부-5300
결재일자	2014.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신호과장	도시철도설비부장
윤창현		김영하	06/12 정찬웅
협조	송변전과장		김형기
	정보통신과장		이용기

우이-신설 도시철도 민간투자사업 시스템 분야 책임감리 용역

(3차분)계약기간 연장을 위한 설계변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6. 12

도시기반시설본부

도시철도설비부

우이-신설 도시철도 민간투자사업 시스템 분야 책임감리 용역

(3차분)계약기간 연장을 위한 설계변경 보고

“우이~신설 도시철도 민간투자사업 시스템 분야 책임감리 용역” 관련, 선행공정의 지연으로 발생한 미투입 감리비에 대한 설계변경 보고임

용역 개요

❍ 용역명 : 우이~신설 도시철도 민간투자사업 시스템 분야 전면책임감리 용역

❍ 계약자 : (주)경인기술 외 2개사

❍ 계약 현황

(단위: 천 원)

구 분	계약기간	계약금액	비 고
총 차	′12. 1. 9 ~ ′15. 5. 8	2,714,800
1 차	′12. 1. 9 ~ ′12. 6. 8	163,100
2 차	′12. 6. 9 ~ ′13. 5.24	356,458
3 차	′13. 5.25 ~′14. 6.12	407,842
잔여	′14. 6.13 ~′15. 5. 8	1,787,400

3차 용역 설계 변경

❍ 변경 사유

‣ 선행공정의 지연으로 인한 시스템공사 시기 미도래로 상주감리 철수

‣ 감리원 투입중지(3인 중 2인철수)에 따른 정산사유 발생

❍ 변경 방향

‣ 제1안 : 감액 준공처리 후 재계약보다는 감액만큼 기간을 연장

(단위:천 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
계약금액	407,842	407,842	변경없음
계약기간	′13. 5.25 ~′14. 6.12	′13. 5.25 ~′14. 9.23

‣ 제2안 : 감액 준공처리 후 재계약

❍ 예산과목 : 신교통수단 도입, 경전철 건설사업, 우이~신설 지하

경전철 건설, 시설비 및 부대비, 감리비

조치 계획

❍ 제1안과 같이 감리원 철수로 인한 잔여 계약금액을 감액(준공처리)하지 않고, 잔여 계약금액 만큼 계약기간을 연장하는 것으로 변경계약

붙임 : 1. 용역계약체결통보서 1부.

2. 3차 계약내역서 1부.

3. 3차 설계변경내역서 1부. 끝.