부 장		06/12 정찬웅		과 장	김영하	심사자	김창환	설계자		윤창현	설 계		심 사		결 재
											14년 6월 12일		14년 6월 12일
설계변경 내역서
	용역명 : 우이-신설 도시철도 민간투자사업 시스템분야 책임감리용역(3차) 설계변경
	구 분					당 초(원)			변 경(원)			증･감(원)		비 고
	총 용 역 비					407,842,000			407,842,000			0
	도급비		공 급 가 액			370,756,455			370,756,455			0
			부 가 가 치 세			37,076,545			37,076,545			0
			계			407,842,000			407,842,000			0
용역개요 : - 사업구간 : 서울시 강북구 우이동 ~ 동대문구 신설동 - 규 모 : 정거장 13개소, 차량기지 1개소, 종합관제실 1개소 - 기 간 : `13.5.25 ~ `14.6.12 → ‘13.5.25 ~ `14.9.23 - 주요변경사항 : 투입인원 변경(고급기준) : 43.293명 → 42.554명 (감 0.739명)