문서번호	방재시설부-4423
결재일자	2014.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
한종수		서관석	06/12 代서관석
협조

용허리 빗물저류조 설치공사 폐기물처리용역

설계변경(1회) 검토 보고

2014.  6.

서울특별시도시기반시설본부

『용허리 빗물저류조 설치공사 폐기물처리용역」

설계변경(1회) 검토 보고

우리 본부에서 시행 중인「용허리 빗물저류조 설치공사 폐기물처리용역」에 대해 공사시 추가로 발생한 폐기물에 대하여 폐기물 처리용역 설계변경을 시행코자 보고드림.

1		관련근거

▢ 방재안전시설부-3044호(ʹ14.2.25) : 「하수관등 지중구조물 발생 실정보고 검토」

▢ 잠원2감 2014-163호(ʹ14.6.9) : 「폐기물처리용역 설계변경 검토보고」

2		용역개요

▢ 용 역 명 : 용허리 빗물저류조 설치공사 폐기물처리용역

▢ 위     치 : 용허리 근린공원내

▢ 규     모 : 폐아스콘 및 폐콘크리트 등 운반․처리

○ 폐콘크리트 : 564톤, 폐아스콘 : 905톤

▢ 용역기간 : ʹ13. 2. 1 ~ ʹ14. 9. 30

▢ 총용역비 : 금37,871,620원

▢ 용 역 사 : ㈜해솔산업개발 대표 유 길 문

3		감리보고내용

▢ 「용허리공원 빗물저류조 설치공사」시행중 기 매설된 하수관 등 지중구조물(377㎥)이

추가로 발견되어 폐기물 반출수량이 증가됨으로 폐기물 용역 설계변경이 필요 함.

- 폐콘크리트 운반 및 처리 : 당초 564톤 → 변경 1,452톤,  증 888톤

- 용역비 : 당초 37,871,620원 → 변경 59,981,900원,  증 22,110,280원

4		조치의견

▢ 상기 책임감리 보고내용과 같이 공사로 인한 폐기물 증가로 설계변경에 반영함이 타당하므로, 본 공사 시행에 차질이 없도록 설계변경시 반영코자 함.

붙임 : 감리단 검토보고  1부.  끝