투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	변경계약(계약기간 연장) 요청

2013. 5. 24. ㈜경인기술 외 2개사와 계약을 맺은 “우이~신설 도시철도 민간투자사업 시스템분야 전면책임감리용역(3차)”에 대하여 아래과 같이 계약기간 연장을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

❍ 용역명 : 우이~신설 도시철도 민간투자사업 시스템 분야 전면책임감리 용역

❍ 계약자 : (주)경인기술 외 2개사

❍ 계약 현황

(단위: 천 원)

구 분	계약기간	계약금액	비 고
총 차	′12. 1. 9 ~ ′15. 5. 8	407,842
3 차	′13. 5.25 ~′14. 6.12	407,842

❍ 변경 현황

(단위:천 원)

구 분	당 초	변 경	비 고
계약금액	407,842	407,842	변경없음
계약기간	′13. 5.25 ~′14. 6.12	′13. 5.25 ~′14. 9.23

- 변경사유: 선행공정 지연에 의한 미투입 감리비 정산

- 변경조건: 지체상금 면제(발주처 요구에 의한 변경)

붙   임 : 1. 용역계약 체결통보서(계약서) 1부.

2. 설계변경 보고서 1부.

3. 설계변경내역서(갑지 결재분) 1부.

4. 설계변경내역서 1부.  끝.

	도시철도설비부장
주무관	윤창현		신호과장	06/12 김영하
협조자
시행	도시철도설비부-5309	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 삼일대로 231(예장동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	772-7327	/전송	772-7308	/	chng3521@seoul.go.kr	/	대시민공개