문서번호	시설보수과-2234
결재일자	2014.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
최태석		박춘배	06/13 정진오
협조

용역사 조치계획에 대한 검토결과 보고

[시조사삼거리 실시설계용역]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 06.

성동도로사업소

(시설보수과)

용역사 조치계획에 대한 검토결과 보고

시조사삼거리 교차로구간 개선공사 실시설계용역 수행중 자문위원 검토의견과 관련하여, 용역사의 조치계획을 검토하여 반영여부를 결정하기 위함

□ 용역 현황

◦ 용 역 명 : 시조사삼거리 교차로구간 개선(청량제1고가 성능개선

포함)공사 실시설계용역

◦ 용역기간 : 2014.04.03 ~ 2014.09.29

◦ 용 역 비 : 113,190천원

◦ 용 역 사 : (주)유경기술단 외 1개사

◦ 용역개요

- 왕산로 개선 : 보도축소 및 차로확장 : B=3.0m, L=178m

보도육교 철거 1개소(보은육교)

- 망우로 개선 : 보도축소 및 차로확장 : B=3.0m, L=128m

고가 성능개선 1개소(청량제1고가)

□ 용역사 보고사항

◦ 자문회의 의견수렴 결과 기존 교대의 사용성 여부 판단 및 보도부 바닥판의 향후 차도로 사용에 따른 안전진단이 필요

- 교대의 사용성 검토 절차

· 지질조사 등 시행 → 교대 상태평가 → 지지력 확보 여부 판단 → 공사 방안 결정(교대 보수.보강 또는 재시공)

- 보도부 바닥판을 차도로 활용방안 검토

· 정밀조사(단면두께, 강도, 철근배근 등) → 사용성 검토(바닥판 및 거더)

□ 조치 계획

◦ 상기와 같이 용역사 조치계획은 자문회의(2014.05.23.) 결과 검토의견으로 제시된 사용성(기존 교대부 재사용 및 보도부 임시차도 활용) 검토를 위해 필요한 추가조사로 판단되므로, 설계의 시급성을 감안하여 우선 진행토록 조치하고자 하며,

◦ 추가조사에 따른 용역비 증액분(14,700천원-용역사 보고)에 대하여는 추후 실제조사 및 관련 절차에 따라 설계변경시 반영하여 설계용역 수행에 만전을 기하고자 함.

붙임  용역사 조치계획 공문 1부. 끝.