다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	한국수자원공사사장
(경유)	경인아라뱃길사업본부
제목	준공검사신청서 송부

1. 한국수자원공사 경인아라뱃길사업본부-5151(2014.5.27)호 및 5706

(2014.6.11)호와 관련입니다.

2. 경인아라뱃길 조성과 관련하여 준공검사신청서(1-1공구)에 별첨과 같이 직인날인 후 송부합니다.

가. 준공검사 변경신청내역

구 분	면적(㎡)	사업기간
		당 초	변 경
경인아라뱃길 조성 (1-1공구)	2,172,534.7	2010.3.31 ~ 2014.3.31	2010.3.31 ~ 2014.6.30

별첨  준공검사신청서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이정훈		폐기물정책팀장	최규동		자원순환과장	06/13 최홍식
협조자
시행	자원순환과-8736	(		)	접수		(		)
우	100-110	서울 중구 서소문동 37번지 서울특별시청 서소문청사 1동 12층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	(02)2133-3673	/전송	(02)2133-1026	/	jhlee71@seoul.go.kr	/	대시민공개