투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재(가로등주외 2종) 납품기한 연기요청(강남8공구 구룡지하차도 전기공사)

우리 본부에서 추진하고 있는 『강남순환8공구 구룡지하차도 전기공사』용 관급자재에 대해 사용시기가 미도래하여 아래와 같이 납품기한 연기요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 납품기한 연기요청 내용

품 명	계약번호	납품요구번호 (납품요구일자)	납품금액	납품기한		비고 (증)
				당 초	변 경
가로등주	00115108703	1213#######00 (2013/01/24)	80,450,00	`14.6.30	`15.2.28	243일
가로등기구외4종 (가로등기구)	00128171900	1213#######00 (2013/01/18)	28,710,000	`14.6.30	`15.2.28	243일
가로등기구외4종 (램프,안정기)	00128127100	1213#######00 (2013/01/18)	12,590,000	‘14.6.30	`15.2.28	243일

나. 납품업체 : ㈜이엔엘

다. 연기사유 : 선행공정인 토목공사 지연에 따른 관급자재 사용시기 미도래

라. 계약금액 및 수량 : 변경없음

마. 지체상금 부과여부 : 미부과

바. 계약방법 : 조달구매(3자단가)

따로붙임 : 1. 관급자재 납품기한 연기 검토 보고서 1부.

	설비부장
주무관	곽용길		열빛총괄과장	권오식		경리과장	代김영호		설비부장	06/13 박기형
협조자
시행	설비부-6323	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8604	/전송	02-3708-8659	/	yong9345@seoul.go.kr	/	대시민공개