함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행-최종

1. 우리사업소에서 시행하고 있는 『2013년 강서 관내 포장도로 굴착복구공사 (단가계약)』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2013년 강서관내 포장도로 굴착복구공사(단가계약)

나. 도 급 자 : 보형포장건설(주) 대표 박보형, 신의건설(주) 대표 김진국

다. 계약기간 : 2013. 5. 10 ~ 2014. 6. 30

라. 예산과목 : 자본적지출 가동설비자산 구축물 시설비

상수도사업비용 영업비용 급수공사비 신설공사비

상수도사업비용 영업비용 급수공사비 개조공사비

상수도사업비용 영업비용 배급수비 기타교체비

소방관리 소방관리 소방서운영 시설비

마. 설계변경 사유 : 공종별 시공물량 증,감 등

바. 설계변경 금액

구 분	당초	변경	증.감
총공사비	1,808,352,970	1,805,800,000	감) 2,552,970
도 급 비	1,408,052,970	1,408,000,000	감) 52,970
관 급 비	400,300,000	397,800,000	감) 2,500,000

(단위:원)

따로붙임  1. 설계변경 심의위원회 개최결과보고서 1부

2. 설계변경 심의 결정서 1부

3. 설계변경 내역서 1부

4. 합의서 1부.  끝.

주무관	이상무		급수운영과장	조면행		강서수도사업소장	06/13 이상래
협조자
시행	급수운영과-14162	(		)	접수		(		)
우	158-070	서울 양천구 목동 동로 155(신정동 319-15)	/
전화	3146-4598	/전송	3146-4659	/	57sangmoo@hanmail.net	/	대시민공개