함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	관리본관 승강기 설치위치 의견 재 보고

1. 암사행정관리과-45호(2014.03.14. 장애인승강기 설치위치 등 통보) 및 “공정보고회(5월) 개최결과보고(2014.05.29)”와 관련입니다.

2. 장애 및 유약 견학자와 장애직원의 층간 이동에 필요한 승강기 설치 위치에 대한 의견은 아래와 같이 ②안을 최적안으로 보고합니다.

<승강기 설치위치에 대한 검토의견>

구분	세부위치	장 점	단 점	검토결과
①안	장애인램프와 현관연결지점	- 현관 및 출입통로가 직접연결되어 별도의 출입로 개설이 필요 없음 - 본관 전체 동선에 가장 유리한 장소임	- 신축 완료된 출입계단 등을 재시공함으로 예산낭비적 요소가 있음 - 지하 식당의 출입통로 개설이 어려워 신축한 일부분을 재시공 해야함	최초 검토안
②안	비상계단의 남측	- 비상계단을 활용하기 때문에 별도의 출입통로 개설이 필요 없음 - 리모델링이 진행중이므로 효과적인 예산집행이 기대됨 - 지하식당과의 연결도 기존 출입통로를 활용할 수 있어 공사가 용이함	- 구본관 정화조 등의 지하 매설물 조사가 요구됨	암사정수 최적안
③안	사무실 중간지점	- 지하 매설물이 없이 기초공사가 상대적으로 용이함	- 사무실 공간에 별도의 출입통로 개설이 필요하여 사무공간을 잠식함 - 지하 식당벽체와 1층의 홍보실 창고 벽체 및 출입문 허물어야 함 - 건물 중앙이 아닌 한쪽으로 치우쳐 이동동선이 부적합하며, 제어실이나 실험실 등의 활용도가 극히 낮음	시공사 제시안

첨부 : 관리본관 승강기 설치 위치 1부.   끝.

	암사아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(시설과장),범한엔지니어링 종합건축사 사무소장
주무관	오철선		행정관리과장	김영배		소장	06/13 유성종
협조자	정수시설과장	남효돈
시행	행정관리과-3023	(		)	접수		(		)
우	134-860	서울 강동구 아리수로 131(암사동3)	/
전화	3146-5710	/전송	3146-5707	/	ochelsen@seoul.go.kr	/	대시민공개