투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)	공사감독1처장
제목	도림천4복개구조물(우안) 외 1개소 보수공사 관련 업무지시

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 공단에 공사감독 의뢰한 “도림천4복개구조물(우안) 외 1개소 보수공사(‘14.5.20 계약)” 관련 ’14.5.22일 착공후 현재까지 공사 관련 아무런 조치가 없는 등 공사진행이 미진하여 아래와 같이 업무지시하니 공사감독 수행에 차질 없도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○. 당초 착공신고시 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 (‘14.2.7일 안행부 예규 제74호, 이하 “집행기준”)에 기재된 공사공정예정표, 안전·환경 및 품질관리계획서, 공정별 인력·장비투입계획서 등이 누락되어 추가 제출후 시공

○. 현장대리인으로 신고된 지병용(‘54년생)의 현장상주 가능여부 철저히 확인후 공사시행

○. 현재까지 미설치된 공사 가설사무실 및 창고 조속한 설치후 시공

○. 주공정인 포장정비를 위한 특정제품(공법)으로 선정된 교면  방수재 및 신축이음장치 등 투입자재에 대한 구체적인 수급계획서를 포함한 시공계획서 제출후 시공 (향후 자재공급원 승인 필요)

○. 위 사항이 ‘14.6.18(수)일 까지 보완토록 하고, 동 공사는 포장공정이 주공정임을 감안 아스콘 자재시험 등에 철저를 기하여 향후 하자발생 등이 발생치 않도록 하고, 곧 다가오는 우기전에 본 공사가 조속 완료될 수 있도록 공사감독 이행에 철저를 기하기 바라며

○. 상기 사항이 미이행시 정당한 이유없이 공사를 지체하는 것으로 간주하여 관련법규 등에 의거 도급업체에 대한 행정조치 등을 취할 예정임.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	금종융		시설보수과장	김찬구		남부도로사업소장	06/13 민승기
협조자
시행	시설보수과-2401	(		)	접수		(		)
우	150-814	서울 영등포구 도림로 145 (대림동) 남부도로사업소(시설보수과)	/
전화	02-3284-5466	/전송	02-836-3093	/	kum2072@seoul.go.kr	/	대시민공개