예비준공검사조서

문서번호	고도정수반-2256
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		고도정수반장		시설안전부장
		라승보		이임섭		전결 06/13 윤석우

공사명	올림픽대로상수도관이중화부설공사(4차분)
계약자	중흥건설(주) 이길호, (유)위너건설 박진영					준공예정일					2014년 6월 30일
계약금액	금2,713,247,000원 (금이십칠억일천삼백이십사만칠천원정)					예비준공검사일					2014년 06월 11일
구 분		지적 및 지시사항						시정•조치사항
동작대교 남단 기존관 연결부		•되메우기 다짐 및 헬기장 포장 철저 •철저한 공정관리로 공기단축 요						•철저한 시공관리 시행토록 하겠음
전진기지 관부설		•전진기지 수직구 관로 곡관부 보호콘크리트 철근과 직관부 보호콘크리트 철근이 연결 되도록 시공.						•즉시조치토록 하겠음
노량진배수지 기존관 연결부		•배수지내 구조물 철거 작업부 분진망 설치 •D1650mm 밸브 앞 설치되는 공기변 주변에 안전시설 설치 필요						•명일 분진망 설치토록 하겠음 •공기변 주변에 스텐레스 난간 설치 예정임
기 타		•준공관련 증빙서류 준비 및 절차이행 철저 •철저한 공정관리로 준공기한 전 안전하게 공사 마무리 되도록 할 것. •향후 작업계획서를 세부적으로 작성하여 제출할 것.
첨 부	예비준공검사 사진첩 1부.
위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함.
2014년 6월 12일
			검 사 자		지방시설주사				성명	이 재 학
					지방시설주사보				성명	문 정 주
			입 회 자		지방시설주사보				성명	라 승 보
					책임감리원				성명	김 성 수
					현장대리인				성명	고 지 훈