문서번호	토목부-11370
결재일자	2014.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	터널건설과장	토목부장	시설국장		도시기반시설본부장
손준호	명경출	노우성	이광세		06/13 천석현
협 조
	주무관			이석우

『신촌마포로 중앙차로 및 교통구조개선공사』

아현고가 조형물 설치 및 중앙차로 포장 시행계획 보고

2014. 6

도시기반시설본부

(토  목  부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

『신촌마포로 중앙차로 및 교통구조개선공사』

아현고가 조형물 설치 및 중앙차로 포장 시행계획 보고

아현고가는 우리나라 최초로 건설된 고가도로로 역사적 상징성 보존을 위하여 철거 구조물(교각)을 이용 조형물을 설치코자 하며, 내구성이 강한 고품질의 재료로 중앙차로 포장 시행계획을 보고드림.

□ 공사개요

○  위    치 : 마포구 아현동 267 ～ 중구 중림동 754

○ 규    모

- 고가차도 철거 1개소(B=15m, L=939m), 환기구이설 1식

- 중앙차로 설치연장 2.2km, 중앙승강장 6개소

○ 사업기간 : 2013. 6. ~ 2014. 7.

○ 총사업비 : 14,676백만원

○ 감리사 : (주)동해종합기술공사 외1, 시공사 : 에스트건설(주) 외1

□ 추진경위

○ '13.06.18.  : 공사계약 체결

○ '14.03.19.  : 충정로 중앙차로 규제심의 변경승인

※ 차선 및 시설물설치 변경이 많아 재설계 요인 발생

○ '14.03.24.  : 충정로 중앙차로 재설계 추진 요청(교통운영과 → 본부)

○ '14.03.26.  : 아현고가 철거 완료

○ '14.04.21.  : 포장구조 등에 대한 자문회의(1차)

○ '14.05.09.  : 포장구조 등에 대한 자문회의(2차)

□ 조형물 설치(※ 소요비용 60백만원)

○ 조형물 제작 : 아현고가의 역사적 상징성이 있는 교각(P17)을 활용

○ 설치위치 : 시민들의 조망권과 설치공간을 고려 충정로삼거리 교통섬

※ 조형물은 아래 디자인(안)으로 우선 설계에 반영후 추후 방침에 따라 시행여부 결정

설 치 위 치

□ 중앙차로 포장

○ 개선방향

- 도로포장 실천 10계명 취지에 맞게 버스전용차로 포장설계기준 강화

※ 도로포장 수준 향상을 위한 개선방안(행정2부시장 방침 제300호)

- 개질아스팔트 생산 및 시공시 품질관리 철저

- 수분 및 동결융해에 저항성이 강한 포장재료 적용

○ 재  료

- 중앙버스 주행차로 구간은 당초 설계대로 개질아스팔트(67) 포장

- 상대적으로 소성변형에 취약한 정거장 구간에 강성포장(프리캐스트)과 칼라SMA, PSMA를 각 1개소씩 시험 시공하여 포장성능 비교

○ 단  면

- PSMA 시공구간 : 중앙버스 주행차로 구간 및 굴레방 정류장

구 분	당 초	변 경	비 고
단 면	표층(개질아스팔트 #67) 기층(#467) 보조기층 동상방지층	표층(PSMA) 기층(#467) 보조기층 동상방지층	설치면적 5,250㎡
단가 (1a당)	6,152천원	12,990천원

- 칼라 SMA 시험시공구간(도로관리과-3835, ‘14.3.10) : 웨딩타운 정류장

구 분	당 초	변 경	비 고
단 면	표층(개질아스팔트 #67) 기층(#467) 보조기층 동상방지층	표층(칼라 SMA) 기층(#467) 보조기층 동상방지층	설치면적 520㎡
단가 (1a당)	6,152천원	10,961천원 (표층 10cm 시공시 19,400천원)

- 프리캐스트 패널 시험시공구간 : 충정로삼거리 정류장

구 분	당초	변 경	비 고
단 면			설치면적 520㎡
단가 (1a당)	6,152	28,846천원

□ 조치의견

○ 위에서 검토한 바와 같이 기념조형물 및 중앙차로 설치비용 등은 현재 추진중인 재설계에 반영하여 시행코자 하며

○ 소요예산은 충정로 중앙차로 잔여예산을 활용

□ 향후계획

○ '14. 6.13.	: 중앙차로 재설계 완료

○ '14. 6.15.	: 경찰청 규제협의

○ '14. 7월말	: 중앙차로 공사완료

○ '14. 8월초	: 중앙버스차로 공용 개시.

붙임 : 1. 버스전용차로 아스팔트 설계기준 1부.

2. 자문회의 결과 요약 1부.  끝.