문서번호	시설과-4130
결재일자	2014.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	시설과장	경영지원부장	서울역사박물관장
김준회	나용제	김소영	06/16 강홍빈
협 조

『서울역사박물관 옥상방수공사』

공사준공기한 연기 보고

2014. 6.

서울역사박물관

시설과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

『『서울역사박물관 옥상방수공사』

공사준공기한 연기 보고

박물관 내 옥상방수를 시행중 공사추진기간 우기(비)로 인하여 절대공사기간이 부족함으로 준공기한을 아래와 같이 연기하고자 함.

□ 공 사 개 요

공 사 명 : 서울역사박물관 옥상방수공사

공사기간 : 2014. 5.19 ～ 2014. 6. 17

계약금액 : 263,286,100원

계 약 자 : (주)한국종합그라우팅 대표 육창길

공사내용

- 옥상바닥, 벽체 복합방수      : 4,375㎡

- 옥상 보호몰탈 들뜸부위 철거 후 수평몰탈 : 277㎡

- 연결통로 점검용 사다리 설치 : 1개소

- 탈기반 : 39개소   이중드레인 : 56개소

□ 추진실적 및 현황

’14. 2.27    : 자재(공법) 선정 관련 전문가 자문위원회 개최

’14. 3. 6    : 자체시행 설계도면 작성용역

’14. 4.12    : 사업추진계획 수립방침

’14. 4.14    : 공사발주

’14. 5.19     : 공사착공

□ 준공기한 연기

공사기간 변경

구 분	당 초	변 경	비고
방수공사	‘14. 6.17	‘14. 6.30	13일간

기한연장 사유

- 절대공기 30일간 소요되나 계약기간중 우천(비)에 의해  작업지연됨

- 공사기간중 우기로 인하여 공사가 7일간 중단됨

- 공사소요기간 : 13일 추가 필요

※ 공사지연기간 만회를 위하여 추가로 공사에 필요한 기간(우천지연 : 7일,   바탕면 건조 소요일 : 4일,  품질관리 강화를 위한 옥상에 물을  받아   담수테스트 : 2일   추가 총13일)에 대해 준공기한 연장이 필요함 – 기상현상 증명서 첨부

지체상금 부과여부 : 미부과

처리의견

- 서울역사박물관 옥상방수공사 추진 관련 공기부족에 따라 공사품질관리를 위하여 공사기한을 연기하여 공사준공에 만전을 기하고자 함.

□ 향후추진계획

세부추진계획

공 사 내 용	계약 공정(일)
	5/19일 착공		당초 : 6/17일 변경 : 6/30일
철거 및 바닥공사
방수공사
기타공사

’14. 6.30  : 공사준공.

끝.