함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	변경계약 의뢰(암사정수장 수배전반 제작구매설치_3차)

1. 우리 본부에서 시행중인 암사정수장현대화 및 고도정수처리건설 전기공사에 사용되는 관급자재인 『암사정수장 수배전반 제작구매설치_3차』에 대하여 변경계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 납품건명 : 암사정수장 수배전반 제작구매설치(3차)

나. 납품개요 : 고․저압반, 콘덴서, TR반(31면),MCC, 분전반, 현장조작반등

다. 납품금액

총계약금액	1차(준공)	2차(준공)	3차(금회)
2,434,895,170	200,000,000	753,934,030	1,480,961,140

라. 변경금액(3차)

구 분	당 초	변 경	3차(금회)
3차분(금회)	1,480,961,140	1,490,933,000	증) 9,971,860

마. 변경사유 : 현장여건에 따른 고․저압반의 용량변경(감액) 및 현장조작반의 수량 증․감(증액) 반영으로 인한 변경

바. 납품기한 : 2013.04.23.~2014.06.30.(3차)

사. 예산과목 : 기계장치, (암사정수센터 고도정수처리시설공사), 시설비및부대비(시설비)

아. 계 약 자 : 우경일렉텍 대표 장 만 희

붙임 : 1) 수배전반제작구매설치 변경방침서 및 내부시행문 각1부.

2) 수배전반 변경내역서 1부.

3) ES 계약금액조정 결과 통보서 1부.

4) ES 조달청 수정계약서 1부. 끝.

	기전설비과장
주무관	서기종		기전설비과장	06/16 서대훈
협조자
시행	기전설비과-4002	(		)	접수		(		)
우	120-030	서대문구 서대문로 94 (합동 27-1)	/
전화	02-3146-1337	/전송	02-3146-1319	/		/	대시민공개