투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신자	총무과장
(경유)
제 목	서울역사박물관 옥상방수 준공기한 연장의뢰 요청

1. 시설과-4130(2014. 6.16)호와 관련입니다.

2. 우리과에서 시행중인 서울역사박물관 옥상방수공사의 준공기한 연기를 아래와 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다

가. 공사개요

○ 공 사 명 : 서울역사박물관 옥상방수공사

○ 계 약 자 : (주)한국종합그라우팅   대표 육창길

○ 공 사 비 : 263,286,100원

나. 준공기한

구 분	당초 준공일	변경 준공일	비 고
방수공사	2014. 6.17	2014. 6.30

다. 연기사유

- 우기로 인한 공사공지연기간 만회를 위하여 추가로 공사에 필요한 기간(우천지연 : 7일, 바탕면 건조 소요일 : 4일, 품질관리 강화를 위한 옥상에 물을 받아 담수테스트 : 2일 추가 총13일)에 대해 준공기한 연장이 필요함 – 기상현상 증명서 첨부

라. 귀책소재 : 우리 박물관

마. 지체상금부과 : 미부과

따로붙임 :  1. 준공기한연기 의뢰서 1부.

2. 방침서 1부.  끝.

	시설과장
★주무관	김준회		시설과장	06/16 나용제
협조자
시행	시설과-4139	(		)	접수		(		)
우	110-062	서울 종로구 새문안로(신문로2가) 55번지 서울역사박물관 시설과	/	www.museum.seoul.kr
전화	02)724-0123	/전송	02)724-0244	/	kjh5193@seoul.go.kr	/	대시민공개