함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서초구청장(토목과장)
(경유)
제목	도로굴착 복구기관 변경 요청

1. 평소 상수도 업무에 협조하여 주시는 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리사업소에서 시행중에 있는 『서초동 1576-2번지외 2개소 세척갱생관 정비공사』 중 사임당로와 서초중앙로 공사 구간에 대하여 원인자복구로 굴착허가를 득 한후 공사 시행중, 도로관리청에서 중층 포장을 재생아스콘 대신 신재아스콘으로 복구를 요청하였으나

3. 수도사업소 원인자복구는 중층 포장을 재생아스콘으로 설계 및 시공중에 있는 실정으로 부득이 복구방법이 변경되어 공사가 이뤄지고 있음을 감안하여 복구비 조정을 요청드리오니 처리하여 주시기 바랍니다.

- 아                   래 -

연번	허가번호	복구방법		비고
		당 초	변 경
1	상수-163	원인자복구	관리청복구	차로단위 평삭복구
2	상수-164	원인자복구	관리청복구	차로단위 평삭복구
3	상수-165	원인자복구	관리청복구	차로단위 평삭복구
4	상수-225	원인자복구(간접복구비 부과)	원인자복구(간접복구비 면제)	상수-165 횡단굴착
5	상수-227	원인자복구(간접복구비 부과)	원인자복구(간접복구비 면제)	상수-163 횡단굴착
6	상수-228	원인자복구(간접복구비 부과)	원인자복구(간접복구비 면제)	상수-164 횡단굴착

끝.

	강남수도사업소장
주무관	김영규		시설관리과장	06/16 원의덕
협조자
시행	시설관리과-12881	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울 강남구 양재천로 199 (도곡2동 459-4)	/
전화	3146-4895	/전송	3146-4939	/	kyk76091@seoul.go.kr	/	대시민공개