투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	(주)사림엔지니어링 대표 이영걸 귀하
(경유)
제목	작업기간 연장요청에 대한 회신(세종로 차도 보수)

1. 사림1406-3(2014.6.15.)호와 관련입니다.

2.「2014년 세종로 차도구간 일산유지보수공사(연간단가)-북부」 관련 귀 사의 요청과 같이 작업기간을 변경하오니 기 지시된 도로보수과-4349 (2014.5.20.)호를 준수하시기 바랍니다.

○ 작업기간 변경

- 당초 : 2014. 5. 20 ~ 6. 15

- 변경 : 2014. 5. 20 ~ 6. 30.

- 사유 : 교통통제에 따른 도로공사신고 협의 및 재활용자재 작업. 끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	최진규		도로보수과장	06/16 이석재
협조자
시행	도로보수과-5165	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울시 강북구 한천로 913(번동) 북부도로사업소 도로보수과 별관 2층	/
전화	029445430	/전송	029445072	/		/	대시민공개