문서번호	설비부-6387
결재일자	2014.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
변인수		조예환	06/16 박기형
협조

준공기한 연기 검토 보고

(송정외 1개소 빗물펌프장 증설 통신공사)-총차, 1차

2014.  6.

도시기반시설본부

(설  비  부)

준공기한 연기 검토 보고

(송정외 1개소 빗물펌프장 증설 통신공사)-총차, 1차

송정, 사근 빗물펌프장 증설공사 관련, 선행공종(토목, 건축) 지연에 따른 통신공사(총차, 1차) 준공기한 연기 신청이 있어 이에 대한 검토 보고임.

관련공문

□ 감리단 실정보고

- 통신공사(총차, 1차) 준공기한 연기 검토보고(동화 C14-49호(2014.06.16.)

공사개요

□ 공 사 명 : 송정외 1개소 빗물펌프장 증설 통신공사

□ 공사기간

- 통신공사(1차) : 2013. 5. 7 ～ 2014. 6. 30(총차 2014. 7. 20)

□ 도급업체 : (주)세연텔레콤

□ 감리업체 : ㈜동화이엔씨

실정보고 내용

□ 준공기한 변경내용

공 종	차 수	당 초	변 경	비 고
통신공사	총차	2013.5.7.~2014.7.20	2013.5.7.~2014.12.10	143일 연기
	1차	2013.5.7.~2014.6.30	2013.5.7.~2014.12.10	163일 연기

□ 공사금액 : 변경없음

□ 연기사유 : 선행공종(토목, 건축) 지연에 따른 후속공종 연기

□ 지체상금 부과 여부 : 미부과(시공사 귀책사유 없음)

조치의견

□ 송정빗물펌프장 선행공정(토목, 건축) 지연으로 가설사무실 통신설비 철거, 증설 건물 슬라브 배관 등 후속공정을 진행할 수 없으므로 준공기한 연기가 불가피 함.

□ 준공기한 연기에 대한 실정보고 내용이 타당하므로 준공기한 변경내용에 대해 계약부서인 건설총괄부에 연기의뢰 코자 함.

따로붙임 : 관련공문 및 감리 기술검토의견서 1부.  끝.