문서번호	교량보수과-4148
결재일자	2014.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	북부도로사업소장
이정원		이인섭	06/16 이승진
협조

준공기한 연기에 따른 검토보고(2차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부도로사업소

(교량보수과)

수락고가교외 1개소 보수보강공사

준공기한 연기 검토보고

1. 공 사 개  요

가. 공 사 명 : 수락고가교외 1개소 보수보강공사

나. 공사기간 : 2013년 10월 23일 ~ 2014년 6월 30일

다. 도 급 액 : 2,246,710천원

라. 공   종 : 교면포장 : SMAT-CON포장, T=60mm, A=5,850㎡

신축이음 : NEW F/J,A1,P3,P6,A2 4개소 84m

단면보수 : 슬래부 하면 106㎡

표면보수 : A1,A2 슬래브하면 1,162㎡

프리플랙스 보강 : T=4mm, 240㎡

마. 도 급 자 : (주)극동에버텍 대표이사  유 성윤

(주)가립 대표이사 조 수기

바. 감 독 처 : 서울특별시 시설관리공단 공사감독2처

2. 공단 실정보고

◯ 수락고가교 외 1개소 보수보강공사중 도급사가 제출(2014. 6. 13)한 준공기한

연기에 대하여 검토 보고(서울특별시시설관리공단 공사감독2처–8789)

가. 준공기한 연기사유 검토

1) 수락고가 확장 및 노원램프 설치 관련 협의(도기본 토목부-8854, 2014.05.12)호

2) 홍지문 터널 배수로 형식 및 수락고가 하부 보강공 설계사 검토 후 작업진행

- 2014.02.28 ~ 2014.04.07 : 홍지문 터널 배수로 형식 재검토 회의(4차례)

※ 회의록 첨부

- 2014.05.12 : 홍지문 터널 배수로 형식 및 수락고가 하부 추가 보강관련 회의

- 2014.05.21 : 설계사 의견조회 요청(공사감독2처-7068호)

- 2014.06.10 : 설계사 검토의견 제출(천일(구조)제14-994호)

- 2014.06.11 : 설계사 검토의견 발주처 제출(공사감독2처-8520)

3) 수락고가 신축이음보수공 기시공구간(의정부방향) 하자보수 완료(05/29) 후 진행

4) 연기요청 일수

- 수락고가 신축이음장치 보수공 : 30일

- 수락고가 하부 프리플랙스 패널보강공 : 30일

- 기타 부대공 및 설계변경 등 : 약 30일

나. 준공기한 연기요청 내용

1) 연기요청 일수 : 31일

- 당 초 : 2013. 10. 23 ~ 2014. 06. 30

- 변 경 : 2013. 10. 23 ~ 2014. 07. 31

다. 준공기한 연기사유 검토결과

1) 연기 책임여부 : 발주청(설계검토 등)

2) 연기 요청일수 : 도급사 요청 31일 적정

3) 지체상금 부과여부 : 미부과

3. 검토의견

공단의 실정보고와 같이 수락고가교 확장설계(간섭) 진행 및 공사구간내 배수로 형식 및 고가 하부 보강방안 설계사 검토 등으로 인한 준공기한 연기에 대하여 적정하여 승인하고 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 합니다.

가. 공사연기 책임여부 : 발주청(설계 검토 등)

나. 공사기간

- 당 초 : 2013. 10. 23 ~ 2014. 6. 30

- 변 경 : 2013. 10. 23 ~ 2014. 7. 31

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

4. 행정사항

가. “수락고가교외 1개소 보수보강공사“ 공사기한 연기에 따라 “수락고가교외 1개소 보수보강공사 폐기물 처리용역” 의 준공기한 연기

1) 용역연기 책임여부 : 발주청(공사 지연에 따른 연기)

2) 용역기간

- 당 초 : 2013. 12. 31 ~ 2014. 6. 30

- 변 경 : 2013. 12. 31 ~ 2014. 7. 31

3) 지체상금 부과여부 : 미부과

4) 용 역 사 : ㈜디엘이엔에스, 삼환환경(주)

5) 용 역 비 : 58,784천원

6) 개    요 : 폐콘크리트 1,000, 혼합폐기물 800, 폐아스콘 400

나. 수락고가, 홍지문터널 교통소통대책 기간 연기(교통운영과)

붙임 : 공단 실정보고서 1부. 끝.