투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 체결보고-청계천하류횡단차집관거개선공사(계속계약 2차)

물재생과-2196(2014.6.9.)호와 관련하여 아래와 같이 변경계약이 체결되었음을 보고합니다.

가. 계약건명 : 청계천 하류 횡단 차집관거 개선공사(계속계약 2차)

나. 계약금액 : 감 금120,000,000원(금일억이천만원)

- 변 경 : 금395,000,000원(금삼억구천오백만원)

- 당 초 : 금515,000,000원(금오억일천오백만원)

※ [총차] 금3,262,980,000원(금삼십이억육천이백구십팔만원)

(총차계약기간 : 2013.12.10. ~ 2016.8.31.)

다. 변경사유 : 계약물량 증감 반영

라. 계 약 일 : 2014년  04월  07일 (변경계약일 : 2014년 06월 16일)

마. 착 공 일 : 2014년  04월  07일

바. 준공기한 : 2014년  12월  31일

사. 계약업체 : 아이에스동서(주)

사업자등록번호 211-86-31577

(☎ 02-3218-6701)

붙임  1. 변경계약서 1부.

2. 변경내역서 1부.  끝.

주무관	정은경		관리과장	박노원		중랑물재생센터소장	06/17 채희정
협조자
시행	관리과-7110	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장3길 64(용답동,중랑물재생센터)	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2522	/전송	02-2211-2529	/	pandw1@seoul.go.kr	/	부분공개(7)