문서번호	시설관리과-9063
결재일자	2014.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강동수도사업소장
강순길	김종희	이계환		06/17 원응연
협 조

거마가압장 모터펌프교체 추진계획

2014. 6.

강동수도사업소

(시설관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

거마가압장 모터펌프교체 추진계획

가압장 모터펌프 전압의 특고압 저압화로 가동전력을 절감하여 국가

전력난 해소와 원전 하나 줄이기에 동참하며, 노후, 양정과다 펌프를   적합한 펌프로  교체,에너지 절약과 효율적이고 안정적인 수돗물  공급

사업개요

교체대상

- 모터펌프 110KW(75HP)×32m~45m×3,300V×4대

교체내용

-  모터펌프 신규제작설치 ( 55KW×2대 특고압 저압화3.3KV→380V)

-  모터펌프 신규 제작설치 (110KW×1대 특고압 저압화3.3KV→380V)

-  모터 신규 제작설치 (110KW×1대 특고압 저압화3.3KV→380V)

- 부속배관 및 기타 공사 1식

추진일정

본부 펌프 용량검토   : 2014. 5.26 ~  6.12

실시설계 및 계약심사 : 2014. 6.14 ~  6.30

발주 및 계약         : 2014. 7. 1 ~  7.25

착공 및 준공         : 2014. 7.28 ~11.30

소요예산

예산과목 : 자본적지출, 가동설비자산, 기계장치, 시설비등

소요예산 : 150,000천원 (모터펌프 및 부속배관 제작설치 1식)

집행방법

입찰 및 구매방법 : 가압장 모터펌프는 고장발생시 단수등이 수반          되는 중요한 상수도 설비임을 감안 납품능력이 있는 우수한 업체의          선정이 필요하고 물품제작 원가분석 능력이 우수하며 거래실례가격

조사가 풍부한 조달청에 계약의뢰 하고자 함.

철거 모터펌프 처리 : 노후 성능저하에 의한 재사용 불가로 고재처리

행정사항

준공후 사업완료 내역 본부 보고 및  시설물 관리 현황 수정.  끝.

≪거마가압장 펌프장 전경사진≫

거마가압장 수배전반 사진

거마가압장 펌프사진