문서번호	공간정보담당관-6312
결재일자	2014.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공간정보개발팀장	공간정보담당관
이용익		김태준	06/17 조봉연
협조

2014년 공간정보 플랫폼 기능 개선 사업

주간보고(6월 2주차)

2014.6.

공간정보담당관

주간업무보고서
사 업 명		2014년 공간정보 플랫폼 기능 개선 사업
기 간		2014.06.09.~2014.06.13.(6월 2주차)			보 고 일	2014년 6월 13일
수 신 처		부 서		서울시 공간정보담당관	담 당	이용익 주무관
발 신 처		회 사		(주)다울지오인포	담 당	김재호 부장
주 요 내 용		○ 요구사항 정의 및 협의 진행 ○ 어플리케이션 계정 변경 방안 ○ 다국어 지도 모바일 웹 검색 페이지 화면구성안 작업
	분류		업무 진행 현황				진행율
금주 실적	분석/계획		○ 요구사항 정의 및 협의 진행 ○ WBS 협의 및 수정 ○ 다국어 지도 모바일 웹 검색 페이지 화면구성안 작업				100% 90% 90%
	운영		○ 어플리케이션 계정 변경 관련 - 어플리케이션 계정 변경 방안 작성 - 어플리케이션 계정 변경 미팅 진행(6/11) ○ 아이투어서울 맵에 희망서울 로고 삽입 관련 진행 여부 확인 작업 - 안드로이드 등록 완료 : 6월 12일 - 아이폰 등록 심사 중				50% 80%
	구축		○ ‘스마트서울맵’ 테마 콘텐츠 관련 아이콘 디자인 수정 작업 - ‘서울스토리’ 메인 및 메뉴 아이콘 : 2종 - ‘한강이 말걸다’ PIN 아이콘 : 4종 - ‘서울시 공동주택’ 메인 및 테마 아이콘				90%
	지도태깅 콘텐츠		○ 서울스토리 - 한양도성 콘텐츠 분석				30%
차주 계획	분석/계획		○ 서울형 지도태깅 공유마당 화면 구성안 기획				10%
	운영		○ 어플리케이션 계정 변경 관련 - 어플리케이션 계정 변경 버전 테스트 진행 - 앱 이관 관련 확인 작업 (다운로드 이양 여부 확인) ○ 아이투어서울 맵에 희망서울 로고 삽입 관련 진행 여부 확인 작업 - 아이폰 등록 확인 - 아이폰 등록 확인 후 진행보고서 작성				80% 100%
	구축		○ 다국어 지도 모바일 웹 검색 페이지 퍼블리싱 작업				60%
	지도태깅 콘텐츠		○ 서울스토리 - 한양도성 콘텐츠 운영 기획 - 한양도성 콘텐츠 운영 관련 미팅 (미정) ○ 생활보건과 지자체 콘텐츠 등록 관련 업무 미팅 (미정)				50%
산출물	○ 기능요약표_V.1.0.0_20140609(안).xlsx ○ 업무보고_어플리케이션계정변경방안_20140610(안).hwp ○ 업무보고_아이콘시안_20140610(안).hwp ○ 다국어지도검색용모바일웹페이지_V.1.0.0_20140613(안).pptx
이슈사항	○ 어플리케이션 계정 이관시 다운로드 승계 가능 여부 확인 중 - 아이폰 App Store / 구글 마켓에 문의 메일 발송 (6/12)
협조 사항
對 서울시
對 용역업체
기타	○ 서울스토리 - 한양도성 담당자 미팅 일정 협의
주간 보고서 협의 사안
○ 다국어 지도 모바일 웹 검색 페이지 화면구성안 확정 → 화면구성안 수정 요청 반영 ○ 요구사항 협의 확정 → 요구사항 출처에 대한 명시와 진행사항에 대한 검토 필요 ○ 어플리케이션 계정 변경건 일정 및 범위 확정 → 기존 애플스토어(아이폰), 구글플레이(안드로이드, 구글)은 계정을 유지하고, 신규 등록할 국내 통신3사 등에는 서울시계정으로 등록