다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 세무종합시스템 운영 및 유지보수 주간보고(13주)

2014년 세무종합시스템 운영 및 유지보수사업과 관련하여 13주차 주간업무 처리 현황을 아래와 같이 보고드립니다.

아   래 -

○ 추진기간 : 2014. 6. 9 ~ 2014. 6. 13.

○ 추진사항

- 추가 및 보완개발 사항

구분	금주실적 (14.6.9~6.13)		차주계획 (14.6.16~6.20)		누적 (14.3.13~6.13)
	진행	완료	진행	완료	전체	완료	진행	지연	잔여	완료율	진행율	지연율
추가개발	2	10	2	8	24	2	9	5	13	8.3	45.8	55.5
보완개발	2	8	1	10	34	9	8	3	17	26.4	50	37.5
합계	3	18	3	18	58	11	17	8	30	18.9	48.3	47.0

- 운영 및 유지보수 사항

구분	전주 (14.6.9~6.13)			금주 (14.6.16~6.20)			누적 (14.3.13~6.13)
	접수	진행	완료	접수	진행	완료	미완료	완료	전체
부과	20	8	25	20	11	17	11	176	187
징수	15	4	14	13	4	13	4	132	136
공통기타	1	6	1	7	10	3	10	62	72

- 지방소득세 부과·징수프로그램 개발사항

구분	분석		설계		개발		테스트		전체
	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적	계획	실적
양도소득	100	99	100	85	8	-	-	-	41.6	36.8
종합소득	100	99	16	16	-	-	-	-	23.2	23.0
특별징수	100	99	100	85	8	-	-	-	41.6	36.8
법인소득	100	99	16	16	-	-	-	-	23.2	23.0
전체	100	99	58.0	50.5	4	-	-	-	32.4	29.9

붙임 : 1. 주간업무 현황보고(13주차). 1부.

2. 추진현황표. 1부.  끝.

주무관	김의중		세무정보화팀장	김천억		세무과장	06/17 김근수
협조자
시행	세무과-13350	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 9층	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3408	/전송	02-2133-1034	/	wj4382@seoul.go.kr	/	부분공개(5)
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다