투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
(경유)
제 목	도로점용 공사장 교통소통대책 점용기간 연장요청(3차)

1. 북부도로사업소 교량보수과-3118(2014.05.07.)호 및 교통운영과-8716 (2014.05.12.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리 사업소에서 시행하고 있는 “수락고가교외 1개소 보수보강공사”와 관련하여 수락고가교 및 홍지문터널 도로점용 공사장에 대한 교통소통대책 점용기간을 아래와 같이 연장요청 합니다.

가. 연장사유

- 수락고가교 확장설계(간섭)

- 공사구간내 배수로 형식 및 고가하부 보강방안 설계사 검토

- 공사기한 연장

나. 도로점용공사장 점용기간 변경 요청 현황

연번	공 사 명	점용기간(당초)		점용기간(변경요청)		비고
		시작일	종료일	시작일	종료일
1	수락고가교 보수보강공사	2013.10.18	2014.06.30	2013.10.18	2014.07.31
2	홍지문터널 배수관로 개량공사	2013.11.20	2014.06.30	2013.11.20	2014.07.31

붙임 : 관련 공문서 사본 1부. 끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	이정원		교량보수과장	06/17 이인섭
협조자
시행	교량보수과-4178	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 번동 (번동 365-1) 북부도로사업소	/
전화	02) 944-5493	/전송	02) 945-5013	/	dlwjddnjs.seoul.go.kr	/	대시민공개