문서번호	공간정보담당관-6308
결재일자	2014.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공간정보운영팀장	공간정보담당관
장인호		김용민	06/17 조봉연
협조
	주무관		유병민

「지하시설물통합정보시스템 기능개선 사업」

주간 보고(5월3주 ~ 6월2주)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5.

공간정보담당관

(공간정보운영팀)

□지하시설물통합정보시스템 기능개선 사업□

주간 보고(5월 3주 ~ 6월2주)

-  -

사 업 명	지하시설물통합정보시스템 기능개선 사업
사업기간	2014.5.9. ~ 2014.11.3.	사 업 자	㈜지노시스템 컨소시엄
사 업 비	96,120천원	사 업 PM	㈜지노시스템 이종수 수석
사업진행 현황	○ 사업수행계획서 및 보안서약서 접수 ○ 착수보고회 개최 ○ 사업범위 및 계획수립 ○ 개발장비 구축 및 소프트웨어 설치

진행단계	착수 단계		전체 진척율	15.27%
업무구분	실적(2014.05.09 ~ 2014.06.11)		계획(2014.06.12 ~ 2013.06.18)
사업관리	□ 계약체결 : 5.8. □ 착수팀 구성 : 이종수 PM 외 6명 - PM : 이종수 수석(지노시스템) - 개발담당 : 김영만, 이승경, 이선화, 김지은 - 기술지원 : 변성제, 최재훈 □ 착공신고서 제출 : 5.16. □ 사업수행계획서 및 보안서약서 제출 : 5.19. □ 선급금신청(40%) : 5.29. □ 사업범위 및 계획수립 - 세부공정표 작성, 범위 설정 및 계획수립		□ 사업범위 및 계획수립 - 세부공정표 작성 - 문서작성지침서
시스템 개발	□ 개발장비 구축 및 소프트웨어 설치 - IIS 서버 환경 세팅 - Visual Studio .NET 2003 설치 - geogate v1.8 설치 및 맵 서비스 세팅 - MySQL 5.0 DB 서버 세팅 □ UI 구성방안 협의 - 시안 작성 및 협의 - 기존안 검토 및 관련 유사사업 참조		□ 개발장비 구축 및 소프트웨어 설치 - 개발서버 구축 완료 □ 문서작성지침서 - 서울시 방법론 기준으로 작성 □ 요구사항기술서 작성 - 작업범위 기술
기타	□ 착수보고회 실시 - 일 시 : 2014.5.23.(금) 17:00 - 장 소 : 서소문별관 1동 3층 스마트정보지원센터 - 참석자 : 공간정보담당관 외 14명
미결업무 및 대책	내 용		대책 및 조치사항
협의사항	□ 과장님 지시사항(5.23. 착수보고회 시) - 기준점관리방안 - 사용자편의성 및 대시민서비스 방안 - 심도의 왜곡현상 최소화 방안 - 사용자 권한 부여 및 보안접속관리 방안 - 홍보방안 등 □ 사업 관련 협의사항 - 연계시스템(도로굴착복구시스템, SDW) 담당자 협의 진행 필요 - 지반통합관리시스템 연계 및 측량기준점 표출 방안 - 지하시설물 데이터의 정비 및 갱신 이력 관리 - 기본 베이스맵 갱신을 위한 연계시스템 현황 분석 - 유관기관 데이터 갱신 방안
산출물 / 별첨사항	일련번호	내 용