문서번호	관광정책과-6913
결재일자	2014.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	관광정책팀장	관광정책과장	관광정책관
이영미	안순봉	박진영	06/17 강태웅

견지동 역사문화관광자원 조성 기본계획 수립 용역 기간 연장계획

2014. 6

관광정책과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

견지동 역사문화관광자원 조성을 위한

기본계획 수립 학술 연구용역 연장계획

「견지동 역사문화관광자원조성 기본계획」용역 관련하여 도시계획, 역사 문화재 보전, 사업추진방식 등 쟁점사항에 대한 심도있는 검토가 필요하여 용역기간을 1개월 연장코자 함

□ 용역개요

❍ 과 제 명 :「견지동 역사문화관광자원 조성 기본계획 수립」용역

❍ 계약금액 : 111,000천원

❍ 용역기간 : ’13.10.29~’14.6.27(8개월)

❍ 주요내용 : 견지동 역사문화관광자원 기본방향 설정 및 조성방안

- 대상지현황 및 수요분석, 공간구성 및 시설물계획, 대상지내 보상규모, 사업비 산출, 재원조달방안, 시설운영방안 및 중장기적 관광명소화 방안

❍ 수행기관 : 서울연구원

□ 추진현황

❍ ’13.10.29 : 수의계약 체결

❍ ’13.12.11 : 착수보고회 및 제1차 실무협의체 회의

❍ ’14. 4. 9  : 중간보고회 및 제2차 실무협의회 회의

❍ ~’14. 6월  : 사업추진단계별 쟁점 검토

□ 계약기간 연장

❍ 용역수행기간 : 8개월⇒9개월(1개월 연장)

구 분	당 초	변 경
용역기간	’13.10.29(화)~’14.6.27(금)	’13.10.29(화)~’14.7.28(월)

❍ 기간 연장사유

- 견지동 역사문화관광자원 기본계획 수립에 있어 도시계획, 역사문화재 보전, 기관별 역할분담, 사업추진방식, 운영주체 등 대안 검토시 쟁점사항에 대한 검토 및 최적안 마련에 연구기간 추가 소요

❍ 계약금액 : 변동없음(※지체상금 부과 : 부과없음)

□ 향후 추진일정

❍ 변경계약(계약기간 연장)의뢰 : ’14. 6. 17

❍ 최종보고회 개최 : ’14. 7월 중순

❍ 용역준공 : ’14. 7. 28

붙 임 : 1)준공기한 연기의뢰서

2)합의각서. 끝.

【붙 임 1】

준공기한 연기의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명   :「견지동 역사문화관광자원 조성 기본계획 수립」용역

나. 계약업체   : (재)서울연구원(대표 이창현)

다. 계약금액   : 금일억일천일백만원정(￦110,000,000)

라. 계약년월일 : 2013. 10.29.

마. 착수년월일 : 2013. 10.29.

바. 준공기한   : 2014.  6.27.

2. 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2014. 7.28.(1개월 연장)

나. 연기사유 귀책소재 : 서울시

다. 지체상금 부과여부 : 부과없음

라. 연기사유

○ 견지동 역사문화관광자원 기본계획 수립에 있어 도시계획, 역사문화재 보전, 기관별 역할분담, 사업추진방식, 운영주체 등 대안 검토시 쟁점사항에 대한 검토 및 최적안 마련에 연구기간 추가 확보

2014 년  6월    일

관광정책과장 박진영 (인)

서울특별시(분임)경리관 귀하

【붙 임 2】

합   의   각   서

1. 계약건명 :「견지동 역사문화관광자원 조성 기본계획 수립」용역

2. 계약업체 : (재)서울연구원(대표 이창현)

3. 계약금액 : 금일억일천일백만원정(￦110,000,000)

4. 계약연월일 : 2013. 10.29.

5. 계약기간 : 2013. 10.29~2014.6. 27

6. 변경사항

계약기간변경	당 초	2013. 10.29 ～ 2014.6. 27
	변경후	2013. 10.29 ～ 2014.7. 28

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2014.  6.    .

주관과 경유		계 약 자
소 속	관광정책과	상 호 : (재)서울연구원
직 급	행정 6급	주 소 : 서초구 남부순환로 340길 57
성 명	이 영 미	대표자성명 : 이창현

서울특별시(분임)경리관 귀하