문서번호	기전과-7493
결재일자	2014.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	기전과장
하상철	한영호	06/18 박재경
협 조

터널 및 지하차도 부점등 • 소화기 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 06.

강서도로사업소

기전과

터널 및 지하차도 부점등•소화기 교체 계획

우리사업소에서 관리하고 있는 터널 및 지하차도의 조명등,소화기에 대한 부점등, 8년이상 소화기를 일제 파악⦁교체하여 조명율 향상과 안전사고 예방 및 시민 교통안전 도모에 만전을 기하고자 함.

시설물 현황

❍ 터    널 : 5개소(화곡, 궁동, 작동, 항동생태, 범박)

❍ 지하차도 : 15개소(외발산, 공항, 개화, 등촌, 오목, 오금, 고척2, 구로, 구로역,

가마산, 신도림, 국회앞, 목동교서측, 오목교서측, 서울교접속교)

❍ 조명등 현황

총 계	터 널			지하차도			비 고
	소 계	차도등	보행등	소 계	차도등	보행등
5,617	2,049	1,709	340	3,568	3,212	356

추진계획

❍ 교체일정 : 2014. 06. 23(월) ~ 07. 04(금)

❍ 교체대상 : 부점등 총 147등 (터널 53등, 지하차도 94등)

8년이상 소화기 총 142개 (터널 36개, 지하차도 106개)

※ 붙임자료 ( 터널•지하차도 부점등 및 소화기 현황) 참조

❍ 추진방법 : 자체인력(가로등 4명, 지하차도 11명) 활용 부점등   및 소화기교체

❍ 투입장비 : 가로등 보수차량 1대, 교통안내 및 소화기교체차량 1대

❍ 작업공정 : 차도 1차선 통제 후 부점등 교체작업 실시하고, 완료 후

다음 차선 통제 후 교체작업 진행

세부추진일정

❍ 터널•지하차도별 작업일정

구 분	부점등수	소화기교체수량	교체작업 일 시	비 고
국회앞	1	34	06.23(월) 13시~17시	부분통제 작 업
구로, 구로역지하차도	18	6	06.24(화) 13시~17시	〃
신도림, 가마산지하차도	7	14	06.25(수) 13시~17시	〃
외발산, 공항, 개화지하차도	26	14	06.26(목) 10시~17시	〃
등촌, 고척2지하차도	16	25	06.27(금) 13시~17시	〃
오목, 오금지하차도	26	5	06.30(월) 13시~17시	〃
화곡터널	16	29	07.01(화) 13시~17시	〃
궁동, 작동터널	23	0	07.02(수) 13시~17시	〃
항동생태, 범박터널	14	7	07.03(목) 13시~17시	〃
목동교서측지하차도	0	8	07.04(금) 13시~17시	〃

행정사항

❍ 교통통제 및 안내방송을 위한 협조공문 발송(관할 경찰서, 교통방송)

❍ 안전사고에 대비한 유관기관 연락체계 유지

향후계획

❍ 램프, 안정기, 소화기 교체폐품 수거 후 일괄 불용처리

❍ 램프, 안정기 등 보수용 예비자재 확보(구매)

❍ 소화기 예비용 구매 확보

❍ 8년이상 소화기 파악 후 부점등 작업시 교체 실시

❍ 주기적인 점검을 통한 부점등 현황 파악 및 교체 실시.

끝.